투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 동부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	교통안전시설물 공사관련 업무협조요청(지하철 920공구)

1. 동부도로사업소 기전과-37(2012.01.03.)호와 관련입니다.

2. 「지하철 9호선 3단계 920공구」 934정거장, 934환기구 교통안전시설물(신호부문) 설치 원인자 부담공사와 관련하여 공사기간을 아래와 같이 변경승인 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

나. 변경사유 : 서울 지하철 9호선 3단계 총사업기간 연장에 따른 공사기간 조정

구분	당초	변경	비고
공사기간	공사승인일~‘15.12.31	공사승인일~‘1612.31
공사장소	934정거장 (방이사거리,방이중학교) 934환기구 (올림픽공원 남4문사거리)	변경없음

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김승조		토목3과장	김정수		도시철도토목부장	12/31 김진팔
협조자	주무관	김소연
시행	도시철도토목부-16712	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 9층	/
전화	02-772-7154	/전송	02-772-7306	/		/	대시민공개