문서번호	방재시설부-17850
결재일자	2015.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	12/31 임춘근
협 조
	주무관			송민영

서울제물포터널 민간투자사업(2공구)

양평유수지 사용에 따른 대책회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

도시기반시설본부

(방재시설부)

서울제물포터널 민간투자사업(2공구)

양평유수지 사용에 따른 대책회의 결과보고

서울제물포터널 민간투자사업(2공구)와 관련하여 양평유수지 작업장 사용에 따른 영등포구청과 협의 지연 및 작업이 지연되고 있어 이에 대한 대책회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		회 의 개 요

○ 일    시 : 2015.12.29.(화) 15시

○ 장    소 : 서울터널(주) 회의실

○ 참 석 자 : 5명

- 도 기 본   : 방재시설과장, 2공구 공사관리관

- 사업시행자 : 서울터널 대표이사. 제물포터널 민간투자사업 2공구                      책임건설사업관리기술자. 2공구 현장대리인

○ 안    건 : 양평유수지(수직구#2) 작업장 사용에 따른 영등포구청과의

원활한 협의 등

Ⅱ		추 진 경 위

○ 2015.05. ~ 10  양평유수지 사용에 따른 영등포구청과 협의         (총13회)

○ 2015.10          양평유수지 사용에 따른 영등포구청장 설명(2회)

영등포구청장 요구내용	조치 내용	비 고
공기정화시설(#2) 위치 재검토 및 안양천내로 이전 불가 국토부 공문 요청	국토교통부 안양천 점유 불가 공문 접수 및 제출	국토부 공문 (하천계획과-4238)
선유고가 철거 및 시기 서울시 확약 요청	서울시 철거 계획 수립 및 철거 확약 공문 제출	서울시 공문 (도로계획과-3645)

○ 2015.11.30.      양평유수지 사용 협조요청 공문발송(도기본→영등포구청)

○ 2015.12.11.      본부장과 구청장 면담 연기(1차)

○ 2015.12.29.      본부장과 구청장 면담 연기(2차)

Ⅳ		회 의 결 과

○ 영등포구청장 면담일정이 2회 연기된 바, 사업시행자측에서는 지역 국회의원, 시의원 등을 통해 구청장을 설득할 수 있는 방안을   모색하고

○ 주무관청(도기본)에서는 1월초에 본부장과 구청장의 면담일정을 조속히 추진 및 확정하여 공사가 원활히 진행될 수 있도록 조치

붙임  현황사진 1부.  끝.

현 황 사 진