투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(4공구) 변경계약 의뢰

1. 도시철도사업부-127호(2016.01.06)와 관련입니다.

2. 우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(4공구)과 관련하여 물가변동(제18회) 및 투입계획 변경으로 인해 다음과 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(4공구)

나. 계 약 자 : ㈜도화엔지니어링 외 3개사

다. 용역기간

구 분	당 초	변 경	비 고
총괄	2009.01.09. ~ 2017.01.31	변경없음	-
7차	2015.06.21. ~ 2016.01.26	2015.06.21. ~ 2016.01.15	감)11일

라. 용역금액 조정 내역

(단위 : 원)
구분	당 초	변 경	증 ․ 감	사 유
총괄 (제22회)	4,672,500,000	4,705,760,000	증) 33,260,000	∘계약금액 : 증)33,260천원 ∘사유 - 물가변동 및 감리원 투입계획 조정 등
7차 (제3회)	587,330,000	587,330,000	-	∘계약금액 : 변경없음

마. 예산과목

- 신교통수단도입, 경전철건설사업, 우이-신설 지하경전철건설, 시설비및부대비, 감리비(특별회계:422,000천원)

- 도시기반시설관리, 도시기반시설관리, 공사장 안전관리대책추진, 시설비및부대비, 감리비(일반회계:165,330천원)

붙  임 : 1. 계약금액 조정 검토보고서 1부

2. 변경내역서(총괄 제22회) 1부

3. 변경내역서(제7차 제3회) 1부

4. 합의각서1부.  끝

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	위성환		경전철1과장	박동룡		도시철도사업부장	01/07 권영찬
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	도시철도사업부-239	(		)	접수		(		)
우			/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7187	/전송	02-772-7305	/	wsh3402@seoul.go.kr	/	부분공개(5)