문서번호	기술심사담당관-1251
결재일자	2014.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비심사팀장	기술심사담당관
임태수		김태기	01/22 최진선
협 조
	건축심사팀장			차재옥
	조경심사팀장			박미애

제8차 건설기술심의(용역발주)사전검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	생활환경과	심의요청	검토의견 통보

2014. 1

기술심사담당관

제8차 건설기술심의(용역발주) 사전검토서

사업내용

안 건 명

서울시 음식물류폐기물 자원화시설 확충과 강서구 폐기물종합처리시설 설치사업 타당성조사 및 기본계획 용역 발주심의

요청부서

기후환경본부 생활환경과

용 역 비

581,240천원

용  역

개  요

○ 용역기간 : 착수일로부터 365일

○ 주요 과업내용

- 서울시 음식물류폐기물 관리 정책방향 제시

- 서울시 음식물류폐기물 처리시설 설치계획 제시

- 강서구 폐기물종합처리시설 설치사업(청소시설)

심의위원

(7명)

위원장	기술심사담당관		최 진 선
위원	건화엔지니어링	부 사 장	송 훈	토질및기초
	광운대학교	교 수	김 임 순	환 경
	(주)유신	전 무	최 경 돈	환 경
	경기대학교	교 수	이 신 표	플랜트
	양평ENS	부 사 장	도 유 봉	플랜트
	벽산파워(주)	기술고문	배 민 호	전 기

내부검토

(4개팀)

○ 설비심사팀 : 임태수, 정경수

○ 토목심사팀 : 이상훈

○ 건축심사팀 : 이승찬

○ 조경심사팀 : 이철형

추진배경

❍ 음식폐기물 처리의 민간위탁 의존도(70%)가 높아 처리비 인상요구 및 수거지연으로 시민불편 초래 → 공공처리 비율 확대 필요

<‘13년 현재 총 3,311톤/일중 공공처리 30%>

총발생량 (톤/일)	공공처리시설(30%)				민간위탁업체(70%)
	소계	사료화 (도봉, 송파, 강동)	퇴비화 (서대문)	에너지 (동대문)	소계	사료화	퇴비화	기타 (원형)
3,311	987	661	228	98	2,324	643	997	684

※ 공공처리 시설 용량 : 5개소 1,360톤/일 (가동율 72% : 987톤/일 처리)

(송파450톤, 강동360톤, 서대문300톤, 도봉150톤, 동대문100톤)

❍ 마곡 도시개발지구내 집단에너지시설의 원할한 건설추진을 강서 청소차고지 이전을 위한 당초 부지(9,282㎡)에 강서구 차고지 등 포함한 종합폐기물처리시설 조성

과업내용

❍ 음식물류폐기물 관리 정책방향

- 기초자료 수집 및 조사

- 음식물류폐기물 성상 및 발생추이 분석(향후 20년간)

- 음식물류폐기물 처리에 대한 중장기 대안 검토

- 서울시 및 수도권의 공공처리시설 현황, 운영실태 분석

- 수도권 민간위탁시설 현황, 운영실태 분석

- 국내외 음식물류폐기물 처리방식 검토 등

❍ 음식물류폐기물 처리시설 설치 계획

- 신규건설 계획시설에 대한 현황 파악 및 타당성 분석

- 공공처리시설 확보에 따른 민간위탁처리시설의 상생방안 제시

- 처리시설 악취방지 방안 제시(악취의 배출허용기준 마련)

- 음식물류폐기물(음폐수)하수연계 처리 및 신기술 검토

- 기타 용역목적에 필요한 사항 등

❍ 강서 청소차고지 설치 기본계획

- 강서구 관내 청소시설조사 및 이전 방안제시

- 폐기물종합처리시설 설치에 따른 각 분야별 기본계획 수립

- 운영관리계획 및 유지관리비 산출

- 관련법규 및 인허가 등 행정조치 사항 검토 등

추진일정

❍ '13. 9 : 서울시 음식물류폐기물 자원화시설 확충 타당성조사 및 기본계획 용역 추진계획 방침 수립

❍ '13. 10 : 강서구 청소시설 이전관련 회의개최

❍ '13. 10 : 기술용역 타당성 심사 요청

❍ '13. 10 : 강서구 청소시설 이전롼련 회의개최

서남 물재생센터내 폐기물처리시설 부지에 강서구 청소시설 포함하여 음식물류폐기물 자원화 공공처리시설 확충 타당성 및 기본계획 용역 추진

향후계획

❍ 14. 3 ~ 15. 3  타당성조사 및 기본계획 용역 준공

❍ 15. 3 ~ 15. 4  시설공사 기본설계 및 실시설계 용역 타당성 심사

❍ 15. 5 ~ 15.12  시설공사 기본설계 및 실시설계 용역 준공

❍ 16. 1 ~ 18.12  공사착공 및 준공

주요 검토의견

:  <기술심사담당관>

○ 기존 및 신규시설의 악취발생으로 인한 인근 주변의 집단민원 발생에 대한 처리대책을 제시할 것

○ 음식물류폐기물처리시설, 폐수처리시설, 악취방지시설 등에 대한 성능보증사항 및 검증방법을 제시할 것.

○ 음식물류폐기물 하수연계처리와 관련, 물재생센터 고농도 음폐수 유입으로 인한 공정내 수처리 부하가 가중되는 사항을 검토하여 제시할 것

○ 장비 및 자재는 경제성, 내구성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 한국산업규격품 또는 동등이상의 자재 및 녹색인증 자재를 우선사용하고, 외국산 장비․자재 사용시에는 선정사유 및 근거자료를 제시할 것

○ 하도급 관련 사항 및 부진공정에 대한 조치 내용과 성과품의 정보소통광장 정보공개 등 과업내용을 보완할 것.

붙 임  1. 과업내용서 1부.

2. 건설기술 심의검토서(기술심사담당관) 1부.  끝.