투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	토목부장
(경유)
제 목	전기감리원 배치기간 변경 요청

1. 남부감 제14-14(‘14.1.21)호와 관련입니다.

2. 남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사와 관련 전기공사비 증가에 따른 전기감리원 배치기간 변경을 아래와 같이 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 전기감리원 배치 기간

○ 당    초 : 12(인×월)

○ 변    경 : 13.6(인×월) [1.6(인×월) 증]

○ 변경사유 : 공사비 증가에 따른 전기감리원 배치기간 변경

따로붙임 : 1. 감리단 공문 1부.

2. 전기감리원 배치 검토보고 1부. 끝.

	설비부장
주무관	박시현		환경설비과장	이달영		설비부장	01/23 박기형
협조자
시행	설비부-831	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서소문 별관 2동 도시기반시설본부 설비부	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8618	/전송	02-3708-8659	/	pshyeon@seoul.go.kr	/	대시민공개