문서번호	도로시설과-1230
결재일자	2014.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		터널복개팀장	도로시설과장
류경엽		정달근	01/23 이용심
협조

지중구조물 내진성능 상세평가 대상시설 선정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1

도시안전실

도로시설과

지중구조물 내진성능 상세평가 대상시설 선정 계획

도로시설물(지중구조물)내진성능평가 용역 관련 예비평가 타당성 및 상세평가 대상 선정 등에 대한 자문을 실시하고 상세평가 대상 시설 선정 보고 임.

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 도로시설물(지중구조물)내진성능 평가용역

○ 대상시설 : 총166개소(터널 28, 복개 45. 지하차도 87, 기타 6)

○ 용 역 사 : 동명기술공단, 한국국토안전연구원

○ 사업기간 : 2013. 7. 5 ~ 2014. 6.29

○ 도 급 액 : 695백만원

□ 추진현황

○ 2011. 8. 1 : 지중구조물 내진성능평가 및 향상요령 제정(국토부)

○ 2013. 4. 5 : 지중구조물 내진성능평가용역 시행계획 수립(실장방침-6413호)

○ 2013. 7. 5 : 내진성능평가 용역 착수보고

○ 2013. 7 ~ 12 : 현장조사 및 내진성능 예비평가

○ 2013.12.12 : 1차 자문(내진 예비평가 결과 및 상세평가 대상선정)

□ 내진성능 예비평가 결과

시설명	시설수	중요노선					그 외 노선					기타
		계	핵심	중요	관찰	유보	계	핵심	중요	관찰	유보
계	166	91		8	68	15	73	4	9	43	17	2
터 널	28	12			9	3	16			9	7
지하차도	87	58			46	12	27			17	10	2
복 개	45	17		8	9		28	4	9	15
언더패스	4	4			4
교 량	2						2			2

※ 과업대상 시설물 중 2개소 내진설계반영(마장, 신사지하차도) 시설은 예비평가 제외

□ 상세평가 시설 선정 기준

○ 기존 시설물 내진성능 상세평가 기준(국토부 2011.7)

- 내진보강 “핵심시설” “중요시설” 우선적으로 내진 상세평가 실시

- 내진보강 “관찰시설” “유보시설”은 정책적 판단에 따라 상세평가 여부 결정

○ 자문위원회 자문의견

- 지중구조물은 전반적으로 안정된 구조물이므로 대표단면을 선정 상세평가

- 라이프 라인 확보 차원의 중요노선(33개)내 시설물 우선 평가

□ 상세평가 시설 선정

○ 터널, 지하차도, 언더패스

- 예비평가(117개소) : 관찰시설(85) 유보시설(32)

- 관찰, 유보시설은 상세평가 실시여부에 대한 정책적 판단이 요구           되어 우리시 중요노선과 시설물의 취약도 지수 등을 고려한 대표           단면에 대하여 상세평가

○ 하천복개

- 예비평가(45개소) : 핵심시설(4)․중요시설(17)․관찰시설(24)

- 평가기준에 따라 핵심, 중요시설 상세평가

○ 대상시설 : 31개 시설

시설물	예비평가 결과	상세평가 대상 시설	선정사유
터 널	28개 시설 (관찰 18, 유보 10)	4개시설 (남산1, 홍지문, 사직, 매봉)	정책적 판단에 따른 대표단면, 중요노선 취약도 지수 고려
지하차도	85개시설 (관찰63, 유보 22)	5개시설 (천호,공항입구, 잠두봉, 송파, 신답)
언더패스	4개시설(관찰 4)	1개 시설 (중랑교서측)
하천복개	45개시설(핵심 4, 중요17, 관찰 24)	21개시설 (핵심 4, 중요 17)	평가기준에 따라 선정

※ 교량 2개소(신정교접속교, 홍제2교) 예비평가 결과 관찰구조로 상세평가 제외

□ 향후계획

○ 2013. 12 ~ 2014. 3 : 상세평가 실시

- 상세평가 대상 시설물 구조 검토 후 그 결과에 따라 지진에 대한 안전성 확인

○ 2014. 3 ~ 4 : 보수․보강방안 검토 및 자문회의

- 내진성능이 부족한 경우 내진 보강 방안 및 개략공사비 산정

○ 2014. 4 ~ 6 : 기술심의, 종합보고서 작성 및 준공

붙임 : 1. 상세평가 대상 시설 및 위치도 1부.

2. 예비평가 결과 1부. 끝.