문서번호	방재시설부-2588
결재일자	2016.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
김상용		조성만	02/25 임춘근
협조	★경리과장		최정수
	주무관		조양호

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』

총차공사 및 폐기물처리용역

준공기한 연기 검토 보고

2016. 02.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』

총차공사 및 폐기물처리용역

준공기한 연기 검토 보고

우리본부에서 시행중인「서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업」총차공사 및 폐기물처리용역 준공기한 연기 검토 보고 임.

사업개요

[시설공사]

❍ 위    치 : 서울시 강서구 마곡동 91번지(서남물재생센터내)

❍ 규    모 : 고도처리시설개량 127만톤/일, 시설현대화 36만톤/일

❍ 사업기간 : 2009. 11. 9 ∼ 2016. 2. 28

❍ 시 공 사 : 대림산업㈜외 5개사

❍ 도 급 비 : 312,237백만원

[폐기물처리 용역]

❍ 규    모 : 폐기물 운반 및 처리(폐콘크리트, 폐아스콘, 혼합, 소각, 재활용폐기물)

❍ 사업기간 : 2009. 12. 02 ∼ 2016. 02. 28

❍ 도 급 자 : 우광개발(주)

보고내용

❍ 시설공사 총차 준공기한 연기 (※ 금액변경 없음)

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	2009. 11. 09 ~ 2016. 02. 28	2009. 11. 09 ~ 2017. 02. 28	증) 365일
계약금액	312,237,000천원	312,237,000천원	변경없음

※ 총차 공사기간은 8차공사 준공후 다음차수 계약절차 소요기간을 감안하여 연장

❍ 준공기한 연기사유

- 장기계속공사로서 ‘15년말 총차공사 공정율이 48.76%로서 절대공기 부족.

❍ 폐기물처리용역 총차 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	2009. 12. 02 ~ 2016. 02. 28	2009. 12. 02 ~ 2017. 02. 28	증) 365일
계약금액	2,416,800천원	2,416,800천원	변경없음

❍ 준공기한 연기사유

- 토목공사와 연동하여 폐기물처리용역 준공기한 연기

조치의견

❍ 총차공사 및 폐기물처리용역 전체분 준공기한이 도래하여 계약기간 연장이 필요한바,

❍ 총차공사에 대하여 금차공사 완료후 장래차수 계약시까지 공사기간의 중단없이 원활한 사업이 추진되도록 전체공사 계약기간 연장하고,

❍ 폐기물처리용역에 대하여도 토목공사와 연동하여 전체분 준공기한을 연기하여 공정 및 공사관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 책임감리원 검토의견서 1부. 끝.