3-5-4	고도정수처리 등 수돗물 고급화(완료)

□ 추진방향

○ 기존 정수처리에서 제거가 어려운 맛·냄새물질 등을 오존 및 입상활성탄 공정을 추가한 고도정수처리시스템 구축으로

○ 시민이 믿고 마실 수 있는 건강하고 맛있는 고품질 아리수 공급

□ 추진목표

○ 2015년까지 6개 정수센터 고도정수처리시스템 구축 완료

구 분	계	영등포	광암	강북	구의	암사	뚝도
규 모 (만톤/일)	380	45	25	95	45	110	60
완료시기		’11.12	’12.12	’14.10	’14.12	’14.10	’15.07
사업비 (억원)	5,285	754	312	1,124	712	1,312	1,071

□ 현황 및 필요성

○ 2015년 7월 뚝도 통수로 서울시 고도정수처리시설 100% 통수 완료

- 조류발생에 따른 곰팡이, 흙냄새 등 맛·냄새 문제 해결

- 소독부산물, 미량유기물질 제거, 염소투입량 감소

□ 사업내용

○ 사업규모 : 6개 정수센터 고도정수처리시설 380만톤/일

○ 사업기간 : ’07 ~ ’15년

○ 사 업 비 : 5,285억원

□ 2015년 추진성과 및 평가

【 추진성과 】

○ 2015. 7월 서울시 고도정수처리시설 100%통수 완료

○ 2015. 9월 1일 서울시 고도정수 100% 기념식 개최

- 장  소 : 뚝도아리수정수센터

- 참석자 : 행정2부시장, 시의회 의장, 환수위원장, 환수위원, 지역주민 등 약 500여명

【 성과평가 】

○ 흙냄새, 곰팡이냄새 제거로 수돗물맛 개선 : 녹조발생시 지오즈민 검출“0”

○ 소독부산물, 농약, 항생제, 미생물 등 제거로 건강 안정성 확보

○ 기후변화로 인한 녹조발생 등 원수변화에 선제적 대응이 가능

□ 2016년 추진계획

○ 최적의 정수처리 운영 방안 마련 ⇒ 효율 향상 및 비용 절감

○ 고도정수처리시설 “현장견학 프로그램” 활성화

□ 연차별 성과 및 계획

완료시기	계	2011년	2012년	2014년	2015년
정수센터	6개 정수센터	영등포	광암	강북, 구의, 암사	뚝도
시설용량 (만톤/일)	380	45	25	250	60

□  소요예산

주요내용	구분		계	’07 ~ ’12	2013	2014	2015	2016
고도정수처리시설구축 (억원)	계		5,285	2,957	909	1,156	263	-
	시예산	일반	5,285	2,957	909	1,156	263	-
		특별
		기금
	국고
	민자

※ 2015년 투자된 예산액 기재

작 성 자	시설안전부장 : 강신재 ☎3146-1501 시설과장 :김도섭 ☎1490 담당 :송병욱 ☎1492