문서번호	토목부-27320
결재일자	2015.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
정문수		이승우	전결 12/17 노우성
협조
	주무관		이석근

준 공 기 한 연 기  보 고

( 성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계 )

2015.12.

서울특별시도시기반시설본부

( 토  목  부 )

준 공 기 한 연 기  보 고

(성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계)

현재 시행 중인 “성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계”용역의 준공기한을 연장하고자 보고하는 내용임.

※ 준공기한 연기 현황 : 2015.12.31. → 2016. 3.31.(증3개월)

▢ 용역 현황

◦ 용 역 명 : 성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계

◦ 위    치 : 마포구 망원동 ~ 영등포구 양화동 (성산대교)

◦ 규    모

- 구조안전성 검토 : 기존 손상규모 및 성능개선을 감안한 구조안전성 검토

- 성능개선 기본 및 실시설계

▻ 슬래브 전면교체 48,000㎡(=480a)

(본교 및 접속교 : B=27.0~39.2m, L=1,455m)

▻ 구조물 보강 (거더, 트러스, 브레이싱 등)

- 유지관리계획 수립

◦ 계약기간 : 2013.11. 1. ~ 2015.12.31.

◦ 계약금액 : 2,490,471,000원

◦ 설 계 사 : ㈜평화엔지니어링, ㈜동해종합기술공사, ㈜진우엔지니어링코리아, ㈜세광엔지니어링

▢ 근    거 : 유신 구조-15-5322호(2015.12.16.)로 과업기간 연장 요청

▢ 추진현황 (공정률 : 96%)

◦ '12. 8. 8. : 노후교량 수명연장 계획 보고 (교량관리과)

- 성산대교 성능개선 추진 (슬래브 전면교체, 거더 보강)

◦ '12. 9.27. : 투자심사 완료 (조건부)

◦ '13.11. 1. : 기본 및 실시설계 착수

◦ '14.12.17. : 기술심의(기본설계 심의) 완료

◦ '15. 2.24. : 설계자문 회의 개최 (총 5회)

◦ '15. 4.24. : 기본설계 완료 및 실시설계 용역 시행 요청 (교량안전과)

◦ '15. 5.13. : 실시설계용역 착수 보고

◦ '15.10. 2. : 실시설계 자문회의 개최 (1차)

◦ '15.12.11. : 공법 선정 위원회 개최

▢ 준공기한 연기사유

◦ 가교 및 도장 공법 선정 절차 이행에 따른 따른 설계기간 부족

◦ 실시설계를 위한 행정절차 이행에 따른 설계기간 부족

- 서울디자인심의, 하천점용 협의, 설계VE 및 건설기술심의 등 수행

▢ 설계변경 내역

◦ 용역비 및 준공기한 내역

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비고
용 역 비	2,490,471,000	2,490,471,000	변경없음
준공기한	′13.11. 1.~′15.12.31.	′13.11. 1.~′16. 3.31.	증)3개월

- 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치의견

◦ 상기와 같이 본 용역의 설계감리를 수행하고 있는 ㈜유신으로부터 제출된 준공기한 연기 검토 결과에 의거 양질의 설계 성과품 납품을 위하여 주무부서(교량안전과)에 준공기한 연기를 요청하여 설계용역 수행에 만전을 기하고자 함.

▢ 향후계획

◦ '16. 1. ~ 2. : 설계VE, 건설기술심의

◦ '16. 3. : 설계준공

붙임 : 설계감리 공문(예정공정표 포함) 1부.  끝.