문서번호	건축부-3072
결재일자	2016.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	★건축부장
강혜진		박범규	03/11 안재혁
협 조
	조경시설과장			신용우
	주무관			강철규
	주무관			김승조

성동소방서 신축공사

건축공사 관급자재 구매계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

도시기반시설본부

(건 축 부)

성동소방서 신축공사

건축공사 관급자재 구매계획

우리 본부에서 추진 중인 성동소방서 신축공사의 건축(토목․조경)공사 관급자재에 대한 구매 계획임

1. 공사개요

○ 공 사 명 : 성동소방서 신축공사

○ 대지위치 : 성동구 행당도시개발구역 공공용시설 2블럭(행당동 92-6번지 소재)

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,175.71㎡

○ 용    도 : 공공업무시설(소방서)

○ 공사기간 : 2016. 1. 25. ~ 2017. 5. 24.(16개월)

○ 도급금액 : 금5,443,010,000원

○ 시 공 자 : 누비종합건설(주) 외 1(현장대리인 엄재국)

○ 건설사업관리자 : ㈜펨코엔지니어링건축사사무소 외1(책임건설사업관리기술자 하명우)

2. 추진경위

○ 2015.11.03. : 건축공사 시행계획

○ 2015.12.14. : 건축공사 계약

○ 2015.12.29. : 공사 착공 전 Kick-off Meeting

○ 2016.01.25. : 건축공사 착수

○ 2016.03.03. : 관급자재 수급계획서 검토보고 제출(건설사업관리단)

3. 관급자재 현황 및 구매계획

□ 설계현황

품 명	공종	단위	수 량	설계금액(원)	비 고
시멘트	건축	포	4,845.00	18,507,900
레미콘	건축	㎥	4,860.00	321,472,140
	토목	㎥	198.64	11,912,038
아스팔트콘크리트	토목	M/T	512.7	39,698,984
철근콘크리트용봉강	건축	톤	576.071	370,809,292
데크플레이트		㎡	4,674.00	157,826,000
타 일		㎡	1,731.00	27,253,484
알루미늄창호		kg	15,116	219,889,700
오버헤드도어		SET	4	39,400,000
파고라	조경	EA	1	17,639,600
등의자		EA	3	1,188,000
잔디등		조	7	3,899,000
수목투사등		조	2	1,260,000
하드우드(캐리)		㎡	418	41,382,000

□ 소요예산 : 1,272,138,138(조달수수료 별도)

(건축: 1,155,158,516 / 토목: 51,611,022 / 조경: 65,368,600)

□ 구매계획

○ 구매방법 : 조달구매

○ 투입시기 : 공사일정에 따라 구매 및 납품요구

○ 조경 관급자재 구매 : 방재시설부

○ 건축 관급자재 구매 ; 건축부

□ 예산과목 : 소방재난본부 소방행정과, 소방행정기반 강화, 직무환경개선, 성동소방서 신설, 시설비

붙임  1. 관급자재 내역서 1부.

2. 관급자재 수급계획 검토보고(감리) 및 수급계획서 각 1부.  끝.