투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기요청 (922공구 건설폐기물처리용역(총괄))

1. 도시철도토목부-3262호(2016.03.18.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 『서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사 건설폐기물처리용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사 건설폐기물처리용역

나. 계 약 자 : ㈜삼보ENT  대표 김완기

다. 계약금액 : 243,773,000원(전체)

라. 용역기간 : 2010.11.10. ~ 2016.03.21.(전체)

마. 폐기물처리용역 기간 변경(총괄 1회)              (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
용역비 (총괄)	243,773,000	243,773,000	변경없음
용역기간 (총괄)	2010.11.10 ~ 2016.03.21	2010.11.10 ~ 2016.12.31	285일 연장

바. 변경사유

- “서울지하철9호선 3단계 922공구 건설공사”의 준공기한 연장에 따른 폐기물 배출계획을 반영하여 용역기간 연장

첨부 : 1) 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2) 감리 공문 및 검토의견서 1부.

3) 준공기한 연기 의뢰서 1부.

4) 합의각서(총괄) 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	안태현		토목1과장	代김용선		도시철도토목부장	03/18 김진팔
협조자	주무관	김용선		계약2팀장	홍연화
시행	도시철도토목부-3285	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스 9층	/
전화		/전송	02)772-7306	/		/	대시민공개