문서번호	토목부-5292
결재일자	2016.3.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
정문수	여용석	전결 03/21 김영수
협 조
	교량건설과장		박용택

공사비 조정 계획 보고

(중랑천 초안산앞 보행교량 설치공사)

2016.  3.

서울특별시도시기반시설본부

( 토  목  부 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

공사비 조정 계획 보고

(중랑천 초안산앞 보행교량 설치공사)

우리부에서 시행 중인 「중랑천 초안산앞 보행교량 설치공사」의 계약심사 결과 등을 반영한 공사비 조정을 보고하는 내용임.

사업개요

◦ 위    치 : 노원구 하계동 학여울청구아파트 ~ 월계동 월계역 (중랑천 횡단)

◦ 규    모 : 보행교량 설치 : 폭4.5m, 연장191m

월계역 입구 교차로 주변 도로구조 개선(경원선 철도교 하부)

◦ 사업기간 : '15. 6. ∼ '18. 6. (설계 : '15. 9.15. ~ '16. 3.29.)

◦ 용역업체 : ㈜경동엔지니어링, ㈜동해종합기술공사, ㈜경진엔지니어링

◦ 총사업비 : 10,527백만원 ('16년 예산 : 2,000백만원)

근 거 : 계약심사과-4505호(2016. 3.14), 3830호(2016. 3. 4),경동 제2016-325호(2016. 3.16)와 관련임.

추진경위

◦ '07.11.26. ~  '08.11.20. : 기본 및 실시설계

◦ '15.05.20. : 보행교량 설치 추진 방침 (하천관리과)

－ 보행교량 마들로 추가 횡단에 따른 재설계

◦ '15.09.15. : 설계용역 계약 및 착수

◦ '15.09.22. : 주민설명회 개최

◦ '15.03.02. : 특정공법선정심사

◦ '16.02.16. ~ 3.03. : 설계경제성(VE) 심사 (계약심사과)

◦ '16.03.04. : 건설기술자문소위원회

◦ '16.03.14. : 공사계약심사 (계약심사과)

계약심사 결과 및 VE 현황

◦ 계약심사 결과

(단위 : 천원)

구 분	심사요청액 (A)	심사금액 (B)	절감액 (C)=A-B	절감률 (C/A)
계약심사	*********	*********	*********	*****

◦ 설계경제성(VE) 심사 제안서 현황

(단위 : 천원)

구 분	원 안	대 안	제 안 서	비 고
설계경제성(VE) 심사	*********	*********	***

주요 조정 내용

공 종	조 정 내 용					세 부 변 경 내 용
< 자재단가 조정 : 계약심사과>
이형철근(16mm이상)	◦자재단가 조정					◦이형철근(16mm이상) -590,000원/톤→ 533,581원/톤
< 일위대가 조정 : 계약심사과 >
엘리베이트설치공사	◦부대철골 - 표준품셈건축7-4적용					◦부대 철골가공 및 조립(현장) -철골공 : 6.0인 → 4.0인
고장력볼트 조이기	◦재료비 만 반영 (배치인원에 볼트체결품 포함)					◦강교 가설 (고장력 볼트 조이기) - 노무비(2인 1조 1일 1,000ea 조립) → 노무비(2인 1조 1일 1,500ea 조립)
말뚝박기용 천공	◦파일드라이버 규격 조정					◦말뚝박기용천공(오거, 토사, ∅45cm) -파일천공전용장비 : 100톤 →40톤
천공 후 항타	◦제외					◦H-Pile천공 후 항타 : 공종삭제 ※말뚝박기용천공(오거)에 항타 비용 포함
강교가설	◦공중비계 제외 등					◦강고가설 접속교 - 강교 가설(작업용 비계) 삭제
SK판넬	◦노무비 품 조정					◦SK판넬 설치 및 철거(m) - 작업반장 : 1.5인 → 0.3인 - 비 계 공 : 1.5인 → 1.5인 - 특별인부 : 3.0인 → 2.0인
강교제작(계단부)	◦표준품셈5-2-1 적용					◦강교제작 계단 - 총중량에 대한 할증 미적용 : 7.0% → 0.0%
토류판 설치	◦표준품셈5-2-1 적용					◦토류판 설치 (T=7cm) - 손율 조정 : 0.9 / 2 → 0.9 / 3 - 노무비 조정 형틀목공 : 0.029인 → 0.073인 보통인부 : 0.077인 → 0.038인
철판천공, 볼트조이기 및 풀기	◦서울시 개선품셈 적용					◦서울시 개선품셈 적용 - 강판구멍 뚫기(t=3cm) - 볼트조이기
가설벤트 제작 및 설치	◦심사자료 불충분으로 심사 제외					◦가설벤트 제작 및 설치비 적용 기준 조정 (잡철물 제작 및 설치→철골공사)에 대하여 특허 업체의 미수용으로 제외
< 공종 및 단가 조정 : 설계업체 >
바닥재 설치	◦목재데크 설치 공종 구분 및 단가 조정 - 교량상부 : 각재 사용 - 계 단 부 : 각재 미사용					◦바닥재 설치 - A=1,044㎡ (교량부+계단부) → A=764㎡(교량부), 280㎡(계단부) ◦각재 단가 - 33,000원/개 → 26,000원/개
< 관급자재 수급방법 변경 : 재무과>
관급자재 조정	◦자재(레미콘) 수급방법 조정 - 사급자재 → 관급자재					◦자재((레미콘) 수급방법 변경 - 관급자재 : 강판, E/V → 강판, E/V, 레미콘
< 설계경제성(VE) : 재무과 >
설계경제성(VE) 제안	◦설계경제성(VE) 제안서 22건					◦설계경제성(VE) 반영 - 반 영 : 13건 (일부반영 : 1건) - 미반영 : 9건

조치계획

◦ 본 공사의 설계도서에 대하여 계약심사 결과, 설계업체 공종 조정, 자재 수급방법 변경 및 설계경제성(VE) 사항을 공사비에 반영하여 공사 발주를 시행하고자 함.

- 자재단가 조정, 일위대가 조정 (계약심사 결과)

※ 계약심사에서 제외된 “가설벤트 제작 및 설치”는 설계도에 우선 명기하고 향후 공사 계약업체에서 선정

- 바닥재 설치 공종 조정 (설계업체 조정)

: 바닥재 설치를 교량부와 계단부로 구분 및 각재 단가 조정

- 공사용 자재 직접구매 대상품목 구매방법 변경

: 레미콘 (사급자재 → 관급자재)

※ 근거 : 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률｣ 제6조에 따라 지정한 중소기업자간 경쟁제품으로 직접구매 대상품목

- 설계경제성(VE) 심사 결과 반영 (계약심사과)

: 신축이음장치 변경 등 22건 중 13건 반영 (별첨)

◦ 공사비 조정 내역

(단위 : 천원)

공 사 명	설 계 금 액	계약심사금액	발 주 금 액	비 고 (조정금액)
중랑천 초안산앞 보행교량 설치공사	*********	*********	*********	*******

향후 계획

◦′16. 3. : 공사발주

붙임 : 1. 계약심사 결과 1식.

2. 설계업체 공문 1부.

3. 설계경제성(VE) 제안서 1식.  끝.