공 사 설 명 서

공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(개화)

공사목적

- 지역 숙원사업을 시행하여 차량통행 불편 민원을 해소하고 한강공원을 찾는 시민에게 접근 편리성과 쾌적한 환경을 제공하는데 그 목적이 있음.

위    치 : 강서구 방화동 46-2(개화 나들목)

공사개요

- 나들목(차도) 1개소 설치 : 폭 5m, 높이 4.5m, 연장 48.5m

- 이중육갑문 1개소, 기존나들목 환경정비(개화, 정곡)

공사기간

- 총차 : 착공일로부터 ~ 790일

- 금차 : 착공일로부터 ~ 2016.06.30

위 치 도

예산 집행계획

1. 공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(개화)

2. 사업비 현황

(단위:원)

총사업비	기 투 자	2016 예산	장 래	비 고
6,500,000,000	25,000,000	4,900,000,000	1,575,000,000

3. 사업비 집행내역

(단위:원)

구 분	공 사 비 현 황				비 고
	총 계	도 급 비	관 급 비	이전비및기타
총사업비	6,500,000,000	4,819,155,800	806,830,000	874,014,200
1 차	25,000,000	25,000,000	-	-
2 차	400,000,000	387,200,000	4,151,360	8,648,640
장래	6,075,000,000	4,406,955,800	802,678,640	865,365,560

4. 예정공정표

공 종	수량	단위	공 사 기 간(2015~2017)											비고
			9월	1월	3월	6월	9월	12월	1월	3월	6월	9월	12월
추진기지 준비공	1	식
강관추진공	1	식
굴착 및 강지보공	1	식
도로시설공	1	식
기존나들목 환경정비공	1	식
부대공	1	식

5. 종평면도, 조감도

□ 종평면도
○ EL 6.30m 은 팔당땜 방류량 6,000ton인 경우임(12.07m는 200년 빈도임) ※ 최근 10년 내 최대방류량 : 2002년 8월 (23,400ton) 2006년 7월 (23,084ton)
□ 조감도
제외지
제내지

제 내 지

제 외 지