2016년도 서울특별시 교통영향평가 소위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 강남순환도시고속도로 건설공사 4공구 (변경)

□ 심의일시 : 2016. 3. 24(목) 10:00

□ 사업개요

○ 사업  규모 : 영등포구 양평동(성산대교 남단)~강남구 수서동(수서IC)

연장 - 동서구간 22.77km, 남북구간 12.03km

○ 사업  기간 :  동서구간 2007~2016년, 남북구간 2007~2021년

○ 사  업  자 : 서울특별시

○ 수립대행자 : ㈜지평도시교통엔지니어링

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 대안1에서 꼬리물기 방지대책(안내표지판, 단속카메라 설치 등)과 안전대책을 마련할 것 ○ 개통 6개월 후 모니터링 결과를 교통영향평가 심의위원회에서 결과를 발표 하고 조치계획을 수립할 것 - 모니터링 계획 및 시행 시에는 서울시 도시교통본부와 협의할 것 ○ 박미주유소 교차로 폐쇄 할 것 ○ 장기안으로 주변필지를 매입하여 기아대교 교차로 선형을 정형화 또는 실현가능한 입체화안을 마련 할 것(모니터링결과 심의시 제시)

서울특별시 교통영향평가 심의위원회 위원장(서명)