문서번호	도시철도토목부-4029
결재일자	2016.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
협조
	주무관

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

지장물(통신선로) 이설방안 변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4

도시기반시설본부

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

지장물(통신선로) 이설방안 변경 검토 보고

본선구간에 저촉되는 지장물(통신설로)은 당초 설계에는 메달기로 반영되어 있으나 줄파기로 확인결과 H-Pile Line에 저촉되어 메달기가 어려워 관리기관과 협의한 결과 일부는 H-Pile Line 밖으로 이설과 일부는 IP전주 매달기후 원상복구 하도록 협의되어 검토 보고임

※당초 : 매달기⇒ 변경 : 이설 및 IP전주 매달기후 원상복구

Ⅰ		관련근거

○ 대한(하남) 제16-172호(2016.3.31) : 실정보고[지장물(통신관로 및 맨홀)저촉에 따른 처리방안 실정보고 보완제출

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사

○ 위    치 : 서울시 강동구 강일동 일원(동광교회~서울시계)

○ 규    모 : 총 연장 1,819m

- 본    선 : 471m (개착박스, 환기구 1개소)

- 입출고선 : 1,348m

○ 도 급 비 : 38,616백만원

○ 공사기간 : '15.03.30 ～ '18.07.26

○ 시 공 사 : 쌍용건설(주)

○ 건설사업관리 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

□ 실정보고 내용

○ 본선구간(0km628m~0k947m) 줄파기로 통신선로 확인결과 지장물이 H-pile line에 저촉되어 유관기관과 협의한바 이설방안이 당초 설계(매달기)와 달라 설계대로의 시공이 어려우며.

○ 유관부서, 건설사업관리단 및 시공사가 추가로 현장조사한 사항과 합동회의 결과를 반영하여 통신지장물 이설방안에 대한 적정성 여부를 검토하여 보고함

□ 지장물 현황

○ 유관기관별 통신지장물 개요

통신사	통신관로(m)			맨홀(개소)	비 고
	종방향	횡방향	계
SK브로드밴드	319	14	333	2	광케이블 4개 관로
SK텔레콤	319	14	333	-	광케이블 2개 관로
KT	371	29	400	2	구리선로 8개 관로
LG U+	319	44	363	2	광케이블 6개 관로
C&M/드림라인	319	14	333	2	광케이블 2개 관로
계	1,647	115	1,762	8

○ 지장물 현황도

○ 관리기관과 이설방안 협의 내용                 (단위 : 원)

구분	이설방안	이설비	비 고
SK브로드밴드	H-pile 배면으로 이설	90,700,000
SK텔레콤	H-pile 배면으로 이설	68,390,000
LG U+	IP전주 가이설 후 원상복구	268,000,000
C&M	IP전주 가이설 후 원상복구	11,030,000
드림라인	IP전주 가이설 후 원상복구	80,704,000
계		518,824,000

□ 공사비 증 · 감 현황                               (단위 : 천원)

구 분	공 사 비		공사비
	당 초	변 경
도급공사비(매달기)	164,630	68,860	▽95,770
관급자 이설(맨홀)	15,000	-	▽15,000
통신선로 이설	-	518,824	△518,824
총 계	179,630	587,684	△408,054

□ 건설사업관리단 검토 의견

○ SQ브로드밴드 및 SK텔레콤의 맨홀은 H-Pile Line에 저촉되지 않고 선로만 저촉되므로 기존맨홀을 활용하여 선로를 H-Pile Line 바깥으로 이설하고

○ LG U+, C&M, 드림라인 등은 맨홀과 선로가 H-Pile Line에 저촉되어 이설이 어려우므로 IP전주 가이설 후 원상복구 토록 하고

○ KT선로는 상기와 같이 다른 통신사의 선로를 이설한후 공간을 확보하여 선로조정 후 매달기로 시행 하는등 유관기관 이설 의견에 따라 추진하는 방안이 타당하다고 판단되며

○ 유관기관의 이설비는 추후 검증위원회 검증절차를 통한 적정성 검토가 필요하며 실정보고 발주처 승인 후 설계 변경시 상세 산출하여 설계에 반영코져 함

Ⅳ		보고자 의견

○ 건설사업관리단에서 제출한 실정보고 검토의견이 적정하다고 판단됨으로 지장물(통신선로) 이설방안 실정보고건을 승인조치하고,

○ 각 기관의 통신설로 이설비는 추후 검증위원회 검증절차를 통하여 적정성을 검토한 후 이설비를 납부코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서 1식.  끝.