문서번호	설비부-5211
결재일자	2016.4.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
김원태		임현근	04/05 권오식
협조

『동부간선도로확장(3공구) 전기(6차) 및 통신(3차)공사』

관급자재 수급계획 및 구매방법 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04.

서울시도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『동부간선도로확장(3공구) 전기(6차) 및 통신(3차)공사』

관급자재 수급계획 및 구매방법 검토보고

우리본부에서 시행중인「동부간선도로확장공사(3공구)」와 관련 2016. 10월 개통 예정인 상도지하차도의 전기(6차) 및 통신(3차)공사에 소요되는 관급자재에 대한 수급계획 및 구매방법에 대하여 검토하고 보고드림

관련근거

□ 동삼감 제2016-37(2016.02.03.)호 : 전기6차공사 관급자재 구매요청

□ 동삼감 제2016-36(2016.02.03.)호 : 통신3차공사 관급자재 구매요청

공사개요

□ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구) 전기6차 및 통신3차공사

□ 공사위치 : 상계주공16단지~의정부시계간 2.25km내 지하차도 2개소

□ 공사기간 : 2016. 01. 22 ～ 2016. 12. 10

□ 공 사 비 : 전기-421,767천원, 통신-25,091천원

□ 시 공 사 : 전기-(주)정등전력, 통신-이엔트컴(주)

□ 감 리 사 : 동부ENG(주)

관급자재 수급계획 및 구매검토

□ 구매사유

- 상도, 장암지하차도 중 상도지하차도는 2016년 10월 개통 예정이므로 개통 전에 공사 및 시운전이 완료되어야 하고

- 지하차도 주요시설자재(관급자재 : 저압 수배전설비, 자동제어, 지하차도조명기구 및 CCTV설비)중 상도지하차도용 자재를 우선 구매하여 공사완공 및 개통에 지장이 없도록 조치

□ 품목별 구매계획 및 소요예산

분야	명칭	단위	설계수량	금회수량	잔여수량	비고
전기공사	저압배전반	면	8	4	4	상도:옥외형
		금액	161,031,000	91,086,000	69,945,000
	자동제어	식	1	0.5	0.5
		금액	115,984,000	40,491,000	75,493,000
	터널등기구	개	233	172	61	LED100W, LED200W
		금액	280,695,000	205,988,000	74,707,000
	계		557,710,000	337,565,000	220,145,000
통신공사	CCTV설비	식	1	0.5	0.5	CCTV 총10 상도6대 장암4대
		금액	115,114,000	66,750,000	48,364,000
	계		115,114,000	66,750,000	48,364,000
합계			672,824,000	404,315,000	268,509,000

※ 전기공사 관급자재 중 가로등자재는 제외하였으며, 지붕형 방음벽 확정후 구매예정

□ 관급자재 구매방법(조달발주)

분 야	품 명	소요예산(천원)	계약방법	구매검토의견
전기공사	저압배전반	91,086	총액계약	조달우수제품
	자동제어	40,491	총액계약	조달우수제품
	터널등기구	205,988	제3자 단가	단가계약제품
통신공사	CCTV설비	66,750	제3자 단가	단가계약제품

향후계획

□ 2016. 4 : 관급자재 구매 및 계약의뢰

□ 2016. 9 : 관급자재 반입 및 설치

□ 2016.10 : 상도지하차도 완공 및 개통

따로붙임 : 감리단 관급자재 구매요청서(전기, 통신) 각 1부.   끝.