문서번호	급수운영과-6940
결재일자	2016.4.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	강남수도사업소장
이승우	조상덕	04/07 정경효

설계변경(최종) 시행 보고 「2015년 강남구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사」

2016년 4월

강남수도사업소(급수운영과)

설계변경(최종) 시행 보고

우리사업소에서 시행중인 『2015년 강남구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사(장기계속단가계약)』의 계약물량 증감에 따른 설계변경(최종) 사항이 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 강남구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : 노후밸브정비 92개소, 소화전정비 20개소,

○ 도 급 비 : **************************

○ 공사기간 : 2015.05.14 ∼ 2016.04.30

○ 시 공 사 : 화진건설(주)   대표 박종섭

○ 예산과목

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비

- 상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비(기타교체비)

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템구축,소방용수시설 등의

설치 및 관리,일반회계,소방용수시설설치,시설비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템구축,소방용수시설 등의

설치 및 관리,일반회계,소방용수시설보수,시설비

Ⅱ		설계변경 내역

○ 금액 변경 내역*********************            (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	*************	*************	************
도 급 비	*************	*************	************
관 급 비	*************	*************	*

○ 변경사유

- 시공물량 증ㆍ감 및 신규공정 발생으로 인한 변경(“붙임”참조)

- 기타 작업지시에 의한 물량 조정

○ 주요 물량 증, 감 현황

구분	공종	단위	당초	변경	증,감
1	노후 제수밸브 교체	개소	43	92	증 49
2	소화전설치 및 보수	개소	20	20
3	기타시설물	개소	15	6	감 9

○ 신규공종 발생(세부내역 별도 붙임)

구분	공종	비고
1	닥타일주철 직관 (100mm) 등 6개 공종	낙찰율86.987%적용

○ 주요공정 검토 현황

구분	검토내용	검토결과	비고
1.토공	아스팔트포장절단(100~150㎜적용)등 92종	이상없음
2.부설공	주철직관부설공(80mm) 등 199종	“
3.구조물공	원형밸브실설치공(80mm) 등 70종	“
4.부대공	기어박스점검및정비 등 76종	“
5.사급자재비	이형관(에폭시분체)80~600mm외 49종	“
6.기타 제잡비	적정한 제잡비 반영여부	“

Ⅲ		변경심사 결과

□ 관련근거 : 재무회계과-5144(2016. 4. 5.) 변경계약금액 조정 결과통보

□ 주요 심사 내용

○ 토공 수량조정

· A-파쇄물운반(인력상차)-2.5DT : 5㎥ → 0㎥

· A-파쇄물운반(0.18상차)-4.5DT : 36㎥ → 41㎥

· 파쇄물걷기및싣기-굴삭기0.18 : 25㎥ → 24㎥

· C-파쇄물운반(인력상차)-2.5DT,야간 : 9㎥ → 7㎥

· C-파쇄물운반(0.2상차)-4.5DT,야간 : 0㎥ → 2㎥

□ 계약심사 결과

(단위 : 천원)

사업명	심사요청액 (도급액)	심사금액	증 액	비고
*****	*************	*************	************	*****

Ⅳ		조치의견

○ 상기의 내용으로 본부 재무회계과에서 설계변경 계약금액조정 심사 결과로 통보되어 붙임 설계도서에 의거 설계 변경 시행하고 재계약(최종)정산 및 준공처리하여 단가계약 업무처리에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 1) 설계변경 계약금액 조정결과 검토서 1부.

2) 설계 변경내역 도서 1부.  끝.