휴일 작업 계획

(16.4.23)

1. 사업명 : 서울지하철 921공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월23일(토)	935정거장	1~3스판 지장물받침 기둥 거푸집 설치작업 1~3스판 중앙파일 해체 및 인양작업 10스판 승강장 거푸집조립 작업 출입구#1 줄파기 및 파일천공 작업 출입구#3,4 터파기 및 주형보 설치	이명환 이사	이태우 과장
	936정거장	- ntr #11,12 강관압입 및 굴착작업, 토압지지대 설치작업 - 1스판 지하3층 1단벽체 철근 및 거푸집조립 작업 - 5~7스판 지하3층 승강장 거푸집 설치작업 - 6~8스판 지하2층 중앙파일 절단 및 인양 - 환기구#2 기초 양생 및 벽체 거푸집 설치준비 - 9스판 중층 슬라브 동바리 및 거푸집해체		이규언 대리
	쉴드터널	- 상행선 횡갱#2 굴착,버럭처리,지보설치,숏크리트 타설 - 상행선 횡갱#1 강재세그먼트 해체 작업 - 하행선 횡갱#2 세그먼트 보강지보 설치 - 하행선 세그먼트 보수 작업		조희진 대리

3. 휴일 근무자 명단

2016.4.23.(토)				2016.4.24.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	이 명 환		감리단	감리원	-
시공사	공무팀장	정 시 권	총괄책임자	시공사	건축팀	허 만 혁	당 직 자
	공사팀	이 태 우			관리팀	송 대 훈	당 직 자
		조 희 진
		이 규 언
	안전팀	이 영 오
		이 현 희
	품질팀	손 석 준
	관리팀	송 대 훈

○ 935정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바7063

○ 936정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	경기90자2140

○ 터널 장비현황

구 분		규 격	등 록 번 호
쉴드터널	굴삭기	08W	서울02파8353
	문형크레인	30ton	-
	문형크레인	10ton	-
	유압천공기	9TON	-

○ 휴일 주간작업 사유

- 935,936정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 쉴드터널 굴진공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 935,936정거장 : 07:00~18:00(주간)

- 쉴드 터널 : 07:00~18:00(주간)

○ 기타

- 휴일작업에 의한 추가 투입비 및 감리비는 시공사 부담임.