구의 배수분구 하수관로 종합정비

팀  장 : 심 형 보(☎ 2133-3794)

담당자 : 배 원 영(☎ 2133-3796)

□ 사업부서 : 광진구청 안전치수방재과

□ 사업개요

○ 위    치 : 구의배수분구(구의 1,2동 , 자양 1,2,3동)

○ 규    모 : 관거정비 총연장 52km중 5.7km(‘13년이전 9km)

○ 총사업비 : 61,616백만원 (14년 7,000백만원, 시설비 : 6,670, 감리비 : 330)

○ 사업기간 : 2012. 05 ~ 2019. 10(7년)

□ 추진현황 및 향후 계획

○ `11. 03 ~ `12.04 : 실시설계용역

○ ‘12. 05 ~ `12.11 : 공사시행(1,2,3공구)-1차

○ ‘13. 03 ~ `13.11 : 공사시행(1,2,3공구)-2차

○ ‘14. 03 ~       : 공사예정(1,2,3공구)-3차

□ 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목		소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소계		7,000,000		7,000,000
시설비	설계비			-
	공사비	6,670,000	-	6,670,000	-	∘ 하수관 개량 (금회) 5,700m× 1,098천원=6,264,000천원 ∘ 기타 1식 = 736,000천원
감리비		330,000	-	330,000	-	∘ 전면책임감리 (L=5,700m)

□ 배정사유

○ 노후 불량 하수관거를 정비하여 수해예방 및 하수악취 발생 해소

○ 원활한 배수체계 확립으로 쾌적한 도시환경 구축

○ 하수관거 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치

□ 검토의견

○ 하수관로 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치