성수2 배수분구 하수관로 종합정비

팀  장 : 심 형 보(☎ 2133-3794)

담당자 : 배 원 영(☎ 2133-3796)

□ 사업부서 : 광진구청 안전치수방재과

□ 사업개요

○ 위    치 : 광진구 화양, 노유, 자양동 일대 (249.24ha)

○ 규    모 : 관거정비 총연장 52.4km중 34.1km(‘13년3.3km)

○ 총사업비 : 58,086백만원 (14년 5,000백만원, 시설비 : 4,730, 감리비 : 270)

○ 사업기간 : 2007. 7 ~ 2015. 12

□ 추진현황 및 향후 계획

○ `95.6 ~`96.12 : 서울시 하수관거 조사 및 하수정비 기본설계(중랑천우안 하류 배수구역)

○ `07. 7 ~`09.6 : 실시설계용역

○ `08.10 ~ `11.10  : 공사시행(1,2,3공구-완료)

○ ‘12. 2 ~ `13.10  : 공사시행(4,5공구)

○ ‘14. 2 ~ `15.12  : 4,5공구 잔여물량 공사 시행 (장기계속공사 시행)

□ 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목		소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소계		5,000,000		5,000,000
시설비	설계비			-
	공사비	4,730,000	-	4,730,000	-	∘ 하수관 개량 (금회) 3,654m×1,108천원=4,048,000 ∘ 기타 1식×682백만원=682,000
감리비		270,000	-	270,000	-	∘ 전면책임감리 (L=3,654m)

□ 배정사유

○ 노후 불량 하수관거를 정비하여 수해예방 및 하수악취 발생 해소

○ 원활한 배수체계 확립으로 쾌적한 도시환경 구축

○ 하수관거 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치

□ 검토의견

○ 하수관로 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치