동선배수분구 하수관로 종합정비공사

팀  장 : 심 형 보(☎ 2133-3794)

담당자 : 배 원 영(☎ 2133-3796)

□ 사업부서 : 성북구청 안전치수과

□ 사업개요

○ 위    치 : 성북구 동선동, 돈암동 일대

○ 규    모 : 하수관개량 D=300∼1,350mm, L=18,55km

○ 총사업비 : 31,969백만원

(14년 6,500백만원, 시설비:6,180, 감리비 : 320)

○ 사업기간 : 2011. 4. 19 ∼ 2017. 12. 31

□ 추진현황 및 향후 계획

○ 2011. 4. 19 ~ 2012. 5. 31  : 실시설계 용역

○ 2012. 7. 27 ~ 2012. 12. 27 : 1차공사 2,424m 시행

○ 2013. 2. 25 ~ 2013. 12. 31 : 2차공사 5,009m 시행

○ 2014. 2.    ~ 2014. 12. 31 : 3차공사 3,650m 시행예정

□ 예산배정계획                                                (단위 : 천원)

예산과목		소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소계		6,500,000		6,500,000	-
시설비	설계비			-	-
	공사비	6,180,000		6,180,000	-	∘ 하수관 개량 L=3.7km 및 하수암거보수보강
감리비		320,000		320,000	-	∘ 전면책임감리 1식

□ 배정사유

○ 노후 불량 하수관거를 정비하여 수해예방 및 하수악취 발생 해소

○ 원활한 배수체계 확립으로 쾌적한 도시환경 구축

○ 하수관로 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치

□ 검토의견

○ 하수관로 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치