투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 의뢰(922공구 전면책임감리용역 총괄6회 및 6차1회)

우리부에서 시행중인『서울지하철 9호선3단계 922공구 건설공사 전면책임감리용역』에 대하여 아래와 같이 변경계약(총괄6회, 6차1회) 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 서울지하철 9호선3단계 922공구 건설공사 전면책임감리용역

나. 감리사 : ㈜선진엔지니어링 외 2개사

다. 변경계약 현황

(단위 : 천원)

구 분	계 약 금 액			용 역 기 간			비 고
	당 초	변 경	증,감	당 초	변 경	증감
총괄(6회)	3,942,613	4,346,600	403,987	2010.08.05. ～2016.04.30	2010.08.05. ～2016.12.31	기간조정 (244일)	총괄 감리비 증)403,987
6차(1회)	1,117,000	1,117,000	변경없음	2015.11.01. ~2016.04.30	2015.11.01. ～2016.12.31	기간조정 (244일)

라. 변경사유

- 공사기간 연장에 따른 전면책임감리용역 계약기간 조정

-「지하철 9호선 3단계 감리투입계획 조정」방침에 의거 감리원   투입계획 및 등급조정으로 변경

마. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설부및부대비, 감리비

붙 임 : 1. 감리투입계획 및 계약금액 조정 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총괄6회 및 6차1회) 1부.

3. 합의각서(총괄6회 및 6차1회) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	안태현		토목1과장	代김용선		도시철도토목부장	04/29 김진팔
협조자	주무관	김용선		기획예산과장	안순봉		계약2팀장	홍연화
시행	도시철도토목부-5432	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스 9층	/
전화		/전송	02)772-7306	/		/	대시민공개