문서번호	토목부-9825
결재일자	2016.5.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
최종구		박용택	05/17 김영수
협조

주차장 엘리베이터 토목 및 건축공사 검토 보고

- 신사사거리~고양시계간 도로개설공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

도시기반시설본부

(토목부)

주차장 엘리베이터 토목 및 건축공사 검토 보고

- 신사사거리~고양시계간 도로개설공사 -

주차장시설물 중 장애인 엘리베이터 설치와 관련하여 시공부서 및 인수부서의 의견을 반영한 실시설계가 완료됨에 따라 토목 및 건축공사를 시행하고자 검토 보고드림.

1		관련근거

○ 신명신사(감) 제2016-113호(2016.05.09) : 실정보고(주차장 엘리베이터 토목 및 건축공사)

2		공사개요

❍ 공 사 명 : 「신사사거리~고양시계간 도로개설공사」

❍ 공사위치 : 은평구 신사동 덕산중학교~고양시 향동동

❍ 공사규모 : 도로개설 폭 25m(4차로), 연장 867m(터널 2개소)

❍ 공사기간 : 2012.12.27. ~ 2016. 5.26

❍ 도 급 비 : 금27,057백만원

❍ 시 공 사/감리사 : 현대건설(주) / ㈜신명건설기술공사 외 2

3		보고 내용

❍ 주차장시설물 중 장애인 엘리베이터 설치와 관련하여 엘리베이터 시공부서(도기본 설비부) 및 인수부서(은평구)의 의견을 반영한 실시설계가 완료됨에 따라, 토목 및 건축공사를 시행하고자 함.

❍  관련근거

- 2015.07.08. 주차장 잔여분 실정보고 승인

- 2015.09.03. 주차장설치 부대시설에 대한 설계 및 공사시행 지시

- 2015.10.19. 주차장 엘리베이터 설계용역 실정보고

- 2016.02.23. 주차장 엘리베이터 실시설계보고(1차)

- 2016.03.23. 주차장 엘리베이터 실시설계보고(2차)

- 2016.04.    엘리베이터 규격 및 제원 설비부 납품 및 설비부 엘리베이터 발주

- 2016.05.02. 주차장 엘리베이터 설계 결과물 납품

❍ 주요 설계 현황

- 엘리베이터 규격 : 15인승(누드형, 관통형) - 본부 설비부 별도발주

- 운행 높이 : 10.46m / 2층(EL.57.28)

- 상층부 접속방식 : 켄틸레버(스틸+화강석) 형식(L=5.32m)

❍ 토목공사

- 기존 교통안전시설물 해체 및 재설치

- 지반보강(Milk-Groutiong 39공) 및 PIT층 굴착

- 우수관로 이설 및 맨홀 1기 신설

- 보도, 차도 깨기 및 재포장, L형 측구외 배수구조물 조정

❍ 건축공사

- 하층부 PIT콘크리트 구조물 및 진출입 구조물+화강석 붙임

- 엘리베이터 외부 철근가공조립 및 유리붙임(Spider-Type)

- 상층부 연결 켄틸레버(Cantilever) 접속교량(L=5.3m)

- 상층부 및 하층부 진출입부 기초구조물 및 장애인 램프 설치

- 핸드레일 등 기차 안전시설 설치

❍ 수량 산정의 적정성 검토

- 수량은 현장 실측에 의해 적정하게 작성하였음.(수량산출서 참조)

❍ 단가적용의 적정성 검토

- 기 계약내용은 기존단가를 적용하였으며,

신규 공종에 대하여는 협의율인 91.06%를 적용하고, 자재단가는 2016년도 물가정보 3개사 중 최저가를 적용, 노임과 장비비는 2016년도 단가를 적용함.

구 분	주 요 내 용	비 고
협의일자	〇 협의일자 : 2016. 3.22 〇 참 여 자 : 공사관리관, 시공사 현장대리인
신규비목	〇 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ②항에 의거 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 계약상대자간 협의 후 결정단가 적용 〇 신규단가 : 협의율(91.06%) 적용 (강제협의율)
기존비목	〇계약단가 적용

❍  개략공사비 현황

(단위: 천원)

구분	공종	규격	단가(원)	단위	당초		변경		증,감	비고
					수량	금액	수량	금액
1.	토목공사							78.981	78.981
1)	지반보강외		40,730,942	식			1	40.731	40.731
2)	배수구조물		23,812,336	식			1	23.812	23.812
3)	포장 및 부대공		14,437,908	식			1	14.438	14.438
2.	건축공사							122.542	122.542
1)	철골공사	흑관Φ264	23,088,931	식			1	23,089	23,089
2)	유리공사	SPG System	71,937,400	식			1	71,937	71,937
3)	기타건축공사		27,516,144	식			1	27,516	27,516
	직접공사비 계							201,523	201,523
3.	간접비			식				68,877	68,877
4.	엘리베이터설치비		234,880,909	식	1	234,881			-234,881
5.	부가세			식		24,488		27,039	3,551
도 급 비		협의낙찰율 (91.06%)				258,369		297,439	39,070

4		조치의견

❍ 엘리베이터 설치와 관련하여 토목 및 건축공사 시행을 위한 감리단 보고내용은 타당하므로 승인처리하고, 추후 설계변경소위원회 자문을 거쳐 설계변경에 반영하고자 함.

붙임 : 1. 감리 검토의견서 1부.

2. 산출 내역서 및 실정보고 사유서 1부.  끝.