설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 용산구청

○ 사  업  명 : 산천동 마을마당 보수정비(주민참여)

○ 사  업  비 : 150백만원(실시설계비 9, 공사비 141)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 자체

○ 심 의 결 과 : 조건부 통과

심  의  내  용

◦ 데크 설치 부분은 기존 마을마당의 규모, 이용행태, 수목 현황 등을 고려할 때 과다하므로 필요성 등에 대해 면밀히 검토하고, 부득이 설치할 경우 규모를 대폭 축소할 것.

◦ 신규 체육시설물은 기 설치된 시설물과 기능이 중복되지 않도록 하고, 색상 등을 고려하여 주변과 조화되도록 설치할 것.

◦ 전면부에 초화류, 키작은 관목을 심고 후면에 키큰 관목을 식재하는 등 녹지의 조망이 용이하도록 수목을 배식할 것.

◦ 회양목, 영산홍, 자산홍을 수량을 축소하고 기존 수목과 어울리는 관목류 및 다년생초화류, 구근류를 추가 식재할 것.

◦ 대상지가 보도와 인접하므로 공사시행 시 ‘보도블록 10계명’을 준수하여 시민 보행 불편을 최소화할 것.