문서번호	정수시설과-867
결재일자	2016.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		임두선	03/17 이달영
협 조
	주무관			이무규

정수장 설비유지보수 전기공사(연간단가)

작업지시 계획(2차수-2회)

2016. 3.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

정수장 설비유지보수 전기공사(연간단가)

작업지시 계획(2차수-2회)

전기설비의 효율적 유지보수를 위한 “정수장 설비유지보수 전기공사(연간단가)”와 관련, 도급자에게 아래와 같이 작업 지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

공사현황

❍ 공 사 명: 구의정수센터 설비유지보수 전기공사(연간단가)

❍ 공사기간: 2015. 9. 22. ~ 2016. 3. 31.

❍ 계약금액: 금31,405,500원

❍ 도 급 자: 동수전설(주) 대표자 이기은

작업지시 사항

❍ 공사내용

- 관리동 전기실에서 중앙제어실까지 냉방기용 전력케이블 포설.

- 염소투입동 및 송수펌프동에 설치된 일반 조명을 LED로 교체.

- 배출수동 TMS실 UPS 축전지 교체.

- 직원 관사 라동 계단 센서등 교체.

❍ 작업지시 수량

- 전력케이블(F-CV 4C 10sq) 포설 63m

- 형광램프 LED로 교체(FL32W*2→LED21W*2) 20등

- UPS 축전지 교체(12V 55Ah 20Cell) 1식

- 센서등(직부형, LED) 교체 1등

조치의견

❍ 상기 사항을 본 공사 도급자에게 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며,

❍ 신규로 발생되는 비목 및 현장여건 상 변동되는 물량에 대해서는 선 시공 후 설계변경 시행시 정산·반영하고자 함.

❍ 작업기간: 2016. 3. 21. ~ 3. 30. (10일)

❍ 소요예산: 금6,351천원

※ 예산집행현황(추정)

(단위: 천원)

계약금액 ①	이전 작업지시 금액 ②	금회 작업지시 금액 ③	집행잔액 (①-②-③)
31,405	23,870	6,351	1,184

붙임: 작업지시내역 1부.  끝.