문서번호	설비부-8785
결재일자	2016.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	임현근	06/01 권오식

준공기한 연기 검토 보고

- 양천주민편익시설 증설 및 리모델링공사(전기,통신) 총차, 3차 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

도시기반시설본부

[설 비 부]

준공기한 연기 검토 보고

- 양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사(전기,통신) 총차, 3차 -

『양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사』와 관련하여 시공감리원으로부터 준공기한(전기,통신) 연기 요청이 있어 검토 후 아래와 같이 보고드림.

1. 검토근거

□ ㈜엄앤드이종홥건축사사무소 양천2016-96호(2016.05.31.)호

- 준공기한 연기 요청(전기 및 통신공사) 검토 보고

2. 공사개요

건 명		전 기 공 사	통 신 공 사
공사기간	총차	2014.11.27. ～ 2016.06.14.	2014.11.24. ～ 2016.07.14.
	3차	2016.01.06. ～ 2016.06.14.	2016.01.06. ～ 2016.07.14.
계약금액	총차	금964,753,690원	금262,145,490원
	3차	금704,753,690원	금162,145,490원
계약자		유진전기 대표 전삼영	㈜네오티스 대표 이운학
감 리 사		㈜엄앤드이건축사사무소

3. 준공기한 연기 검토

□ 연기사유 : 선행공정인 건축공사의 지연(2016.07.21.준공예정)에 따른 후속 공정인 전기, 통신공사의 준공기한 연기.

□ 공사기간 조정

구분			당 초	변 경	비 고
전기공사	공사기간	총차	2014.11.27. ～ 2016.06.14.	2014.11.27.～2016.07.21.	37일 연장
		3차	2016.01.06. ～ 2016.06.14.	2016.01.06.～2016.07.21.
	계약금액	총차	금964,753,690원		변경없음
		3차	금704,753,690원
통신공사	공사기간	총차	2014.11.24. ～ 2016.07.14.	2014.11.24.～2016.07.21.	7일 연장
		3차	2016.01.06. ～ 2016.07.14.	2016.01.06.～2016.07.21.
	계약금액	총차	금262,145,490원		변경없음
		3차	금162,145,490원

□ 감리원 검토의견

- 선행공정인 건축공사의 지연으로 후속공정인 전기, 통신공사의 준공기한을 연장함이 적정.

□ 연기사유 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

5. 보고자 검토의견

□ 감리단의 준공기한 연기 검토 보고가 타당한 것으로 판단되어 건축공사 준공기한인 2016.07.21.까지 준공기한을 연기하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 공사기간 조정 승인요청 공문 1부.

2. 시공사 공사기간 연기요청 공문 및 합의서 각 1부.  끝.