투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	기성금 지급요청(9호선3단계 2구간 정보통신공사 제2차1회)

1. 서지9-3시감 제16-159(2016.06.07)호와 관련입니다.

2.「서울지하철 9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 책임감리원」으로부터  붙임과 같이 9호선3단계 2구간 정보통신공사 기성검사 완료보고(2차1회)가 있어 관련서류를 송부하오니 본 공사의 계약자에게 기성금이 지급될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선연장건설(3단계) 2구간 정보통신공사(제2차)

나. 공사기간 : 2015.11.23 ~ 2017.01.11

다. 계 약 자 : ㈜일광기업 오도진

라. 기성내역

(단위: 원)

계약금액	전회 기성금액	금회 기성금액	누계 기성금액	선금공제	노무비 정산	기성 실수령액	비고
735,000,000	-	200,696,000	200,696,000	41,000,000	12,870,000	146,826,000	기성율 27.31%

붙임 : 기성검사서류 1부(별도 송부).  끝.

	도시철도설비부장
주무관	배종수		정보통신과장	추경수		도시철도설비부장	06/08 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-6071	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7320	/전송	772-7308	/	baejs@seoul.go.kr	/	대시민공개