투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	(주)협우지여엔지니어링
(경유)
제 목	2015년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 설계변경 승인통보

1. 협우지여 제16-신호기10호(2016.6.9.)와 관련입니다.

2. 2015년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사에 대하여 아래와 같이 설계변경 승인하였음을 회신하오니 변경계약, 기성(부분준공), 공사시행 등 감리업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2015.10.5. ~ 2016.9.30.

다. 도 급 자 : 현광전력㈜ 대표 채진석

라. 설계변경 승인내용

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	85,835,450원	100,133,000원	증)14,297,550원

끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	장병준		기전과장	06/09 양영민
협조자
시행	기전과-6170	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8406	/전송	02-300-8410	/	hijun39@seoul.go.kr	/	대시민공개