문서번호	도시철도설비부-6282
결재일자	2016.6.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
김창환		김영하	06/13 정찬웅
협 조

우이-신설 도시철도 민간투자사업

신호T&C 관계자 회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.   .

우이-신설 도시철도 민간투자사업

신호T&C 관계자 회의 결과보고

우이-신설 도시철도 민간투자사업의 공기지연이 예상됨에 따라 잔여공정 중

장기간의 시험․시운전이 필요한 신호분야 T&C 단축방안에 대하여

협의하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		회의개요

○ 사업명 : 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업

○ 일  시 : 2016. 6. 9(목) 17:00~18:00

○ 장  소 : 도시철도설비부장 집무실

○ 안  건 : 신호분야 시험/시운전 단축방안

○ 참석자 : 8명(서울시, 시공사, 시스템공급사 등)

- 서울시(3) : 도시철도설비부장, 신호과장, 담당

- 시공사(1) : 포스코건설 시스템공구 소장 오명환

- 협력사(3) : 포스코Eng 이희영 이사 등 3명

- 시스템공급사(Ansaldo)(1) : 오원찬

Ⅱ		회의내용

1. 서울시의견 : 단축방안 필요

당초 계획보다 공정지연이 예상되므로 T&C 단축방안 마련 필요

2. 시공사의견 : 단축방안 불가

- 인력 추가 투입, 돌관(突貫)작업 등으로 최근 건설한 사우디(리야드)  T&C기간 20개월보다 5개월을 단축하여 15개월로 계획 시행 중

- 선행 토목․건축분야 공정지연(1.5개월)에 따른 후속분야 동시 공사로 인한 간섭으로 비효율적인 T&C 수행  중

- 인력 추가투입 비용 증가 등 현재 여건에서 더 이상의 T&C기간  단축은 불가능 하며, 개통 후 영업열차 안전운행 보장 불가

- 철도안전법 강화에 따른 종합시험운행기간 연장(2개월→4.5개월)으로 개통시기 순연 예상(행정소요기간에 따라 변경될 수 있음)

Ⅲ		검토결과

○ 영업시운전 조건

철도기술연구원 열차 성능인증서․신호시스템 공급사 안전보증서(Safety Case Certification) 발급 후 영업시운전 가능

○ 민자사업 재구조화

‘16년 7월 예정인 민자사업 재구조화에 따라 T&C 추진

Ⅳ		행정사항

우이-신설 도시철도 민간투자사업 SPC 및 건설단에 예정공정내(협약) 준공될 수 있도록 T&C 단축마련하도록 공문시행

첨부   시험 시운전 예상 공정표 1부.  끝.