문서번호	설비부-9525
결재일자	2016.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	임현근	06/16 권오식

- 남부순환로~오정대로간 도로개설 전기 및 신호공사 -

실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.06.

도시기반시설본부

[설 비 부]

- 남부순환로~오정대로간 도로개설 전기 및 신호공사 -

실정보고에 대한 검토보고

「남부순환로~오정대로간 도로개설 전기 및 신호공사」와 관련하여 감리단으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고드림.

1. 공사개요

○ 공 사 명 : 남부순환로~오정대로간 도로개설 전기 및 신호공사(4차)

○ 도 급 액 : 579,466,000원

○ 공사기간 : 2015.11.25 ～ 2016.06.30.

○ 도 급 자 : ㈜삼구전력 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

2. 관련근거

○ 천호수 제2016-251호(2016.06.14.)

- 실정보고[남부순환로~오정도로간 도로개설 전기 및 신호공사] 승인요청

3. 설계변경 주요내용

○ 설계변경 내용

구 분	현황 및 문제점	검토의견	비 고 (단위 천원)
가로등 공사	- 오정대로 기존 가로등 분전함이 토목공사에 지장되어 이전설치 필요 도로포장으로 인하여 기존 가로등 철거후 주변이 어두워 사고우려됨 통합전주 누전차단기 누락 가로등주 직선접속제 누락 부천시구간 기존 디밍제어기 이설 및 신규 디밍제어기 설치 누락	- 철거시 야간 보행자의 사고가 우려되어 이설후 임시사용 보행자의 안전한 통행을 위하여 투광등 2등 설치 보행자 감전사고 예방을 누전차단기 및 유지관리 부서의 요청으로 직선접속제 설치 부천시 유지관리 부서의 요구로 디밍기 이설 및 신규 설치	증)5,658
제 경 비			증)3,532
합 계			증)9,190

4. 감리원 검토의견

○ 공사진행 중 지장물 철거에 따른 임시공사 및 설계누락 부분 반영함이 타당

5. 보고자 의견

○ 본 공사의 감리단의 실정보고 내용을 검토한 결과 실정보고 내용이 타당하다고 판단되어 실정보고 사항을 승인하여 선 시공하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

따로붙임 : 감리원 실정보고서 제출 건 1부.  끝.