투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약-수상레포츠 통합센터 기본계획 보완용역 준공기한

1. 수상기획과-1787(2016.6.20.)호와 관련 입니다.

2. 수상기획과에서 시행중인 『시행중인 “수상레포츠 통합센터 기본계획 보완용역”에 대하여 아래와 같이 준공기한 변경계약을 하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 수상레포츠 통합센터 기본계획 보완용역

나. 용역기간 : 2016. 5.26. ~ 2016. 6.22

다. 계약금액 : 금17,100,000원 (부가세 별도)

라. 계 약 자 : ㈜이립ANC건축사무소

마. 준공기한 연기 : 2016. 5.26 ~ 8.22 (2개월 연장)

- 연기사유 : 과업지시서상 운영비 추가 분석요구에 따른 절대공기부족

바. 연기귀책 소재 : 한강사업본부

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 변경요청 내역 1부. 끝.

주무관	이규옥		총무과장	06/21 박병현
협조자
시행	총무과-10472	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0713	/전송	02-3780-0740	/	santamam@seoul.go.kr	/	대시민공개