문서번호	토목부-12603
결재일자	2016.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		진재섭	06/21 김영수
협조

한전주등 전도방지시설 설치 검토보고

(사가정길(장안삼거리~전농동사거리) 확장공사)

2016. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

한전주등 전도방지시설 설치 검토보고

(사가정길 장안삼거리~전농동사거리 확장공사)

하수관로 부설구간내 한전주등 지장물에 대하여 전도위험이 있어 H-PILE 및 크레인을 이용하여 전도방지코자 검토 보고드림.

공사현황

○ 사 업 명 : 사가정길(장안삼거리~전농동사거리) 확장공사

○ 위    치 : 동대문구 장안동 555(장안삼거리)~전농동 32 (전농사거리)

○ 규    모 : 도로확장 폭5차로 → 6~7차로, 전체 1,200m중 520m

-  배봉사거리 구간 : 폭5차로  →  6~7차로, 연장390m

-  전농사거리 구간 : 폭5차로  →  6차로, 연장130m

○ 기    간 : 2016.2.29. ~ 2016. 12.31.

○ 사 업 비 : 7,960백만원

○ 시 공 사 : 고양종합건설(주), 감 리 사 :  ㈜삼안외 2

○ 공 정 율 : 15%, 하수시설물 설치중

실정보고

○ 굴착작업시 전도방지비용 반영 필요

- 하수관로 굴착구간내 지장물(한전주, 가로등, 이정표등)들이 하수관 터파기 굴착심도가 1.8∼2.5m이나 지장물은 기초 심도가 1.5m로 낮고,

하수관과 0.5m ~1.0m정도 이격되어 있어 전도에 대한 위험성이 높아 방지 시설이 필요함.

- 한전과 사전 협의 결과 작업의 안전성을 고려하여 하수관로 작업 종료시까지 변압기가 달려있는 한전주의 경우 H-pile 및 보강지지철물을 이용(근입깊이 H=4m, 2본)하고

기타 지장물(가로등, 이정표등)은 크레인(15ton)를 이용, 직접 지지하는 방식 적용하여 추진

○ 현황사진

○ 전도방지시설 평면도

한전주, H-PILE지지	가로등,이정표,신호등 등 크레인지지(15TON)

○ 물량 검토

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증,감
H-PILE 천공	D400	m	-	224	224	한전주28개 H=4m,2본
H-PILE박기 및 인발	H-300＊300＊10＊15	본	-	56	56
지지철물 설치 및 해체	2단	개소	-	11	11	변압기 유
	1단	개소		17	17	변압기 무
무근콘크리트 타설	25-18-80	㎥	-	22.6	22.6	한전주, H-pile하부
시험터파기 및 임시아스콘 포장		개소	-	28	28	지중매설물 확인
기타 지장물 전도방지	크레인 (15ton)	hr	-	82	82	가로등외 41개소, 2시간
강재사용료	H-pile	TON	-	6.58	6.58
	ㄱ형강	TON	-	0.81	0.81	지지철물

○ 사업비 검토                                             (단위 : 천원)

구 분		당초	변경	증.감	비고
공사비 계		-	47,100,000	47,100,000
직접 공사비	H-PILE 천공	-	7,826,560	7,826,560
	H-PILE 박기	-	2,127,440	2,127,440
	H-PILE 인발	-	2,127,440	2,127,440
	지지철물 설치 및 해체	-	3,630,869	3,630,869	변압기 유
	지지철물 설치 및 해체	-	2,805,663	2,805,663	변압기 무
	무근콘크리트 타설	-	2,345,947	2,345,947
	시험터파기 및 임시아스콘 포장	-	2,973,096	2,973,096
	기타 지장물 전도방지	-	5,139,186	5,139,186
	강재사용료	-	671,160	671,160	H-pile
	강재사용료		162,810	162,810	ㄱ형강
	계	-	29,810,171	29,810,171
제잡비 및 부가세		-	17,289,829	17,289,829

○ 신규단가적용 검토 :  낙찰율(86.745%) 적용

- 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제①항 제2호 에 의거 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률(86.745%)을 곱한 금액 적용 협의완료

검토결과

○ 비용반영을 위한 책임건설사업관리기술자의 실정보고가 타당함으로 승인코자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.