투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	업무지시전(공사 중지 알림-석촌지하차도 상부도로 구조개선 전기공사)

1.공 사 명 : 석촌지하차도 상부도로 구조개선 전기공사

2.지시일자 : 2016-06-22

3.지 시 내 용: 『석촌지하차도 상부도로 구조개선공사』와 관련하여 선행공정인 토목 구조물 공사가 지장물 등의 사유로 일시중지됨에 따라 후속공정인 전기공사도 일시적으로 중지함을 알려드리니, 책임기술자께서는 현장 관리방안을 우리 본부로 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 공사중지 개요

- 시 공 사 : ㈜삼언전공 대표 공석복

- 공사기간 : 2016. 3. 25. ~ 2017. 5. 2.

- 공사중지 사유 : 선행공정(토목) 일시중지

- 공사중지 기간 : 2016. 6. 22. ~ 2016. 9월(예정)

끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

							서울특별시도시기반시설본부장
수신자					석촌지하차도 상부도로 구조개선 책임건설사업관리기술자 귀하,삼언전공(주) 대표 공석복 귀하
주무관							신정규			녹색성장과장					김창균					설비부장					전결 06/22 권오식
협조자
시행			설비부-9812									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8640						/전송			02-3708-8659					/													/	대시민공개