문서번호	주거재생과-7872
결재일자	2016.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주거재생사업팀장	주거재생과장	주거사업기획관
최명국	이상근	국승열	06/27 김성보

가리봉 도시재생 활성화계획 수립용역

용역계약 변경 검토 보고

(준공기한 연장 및 용역비 증액)

2016.6

도시재생본부

(주거재생과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□	제5호

⌜가리봉 도시재생 활성화계획 수립용역⌟

용역계약 변경 검토 보고

‘16.3.4. 계약 체결 후 추진 중인 ⌜가리봉 도시재생 활성화계획 수립⌟ 용역에 대하여 계약 변경(준공기한 연장 및 용역비 증액)을 검토 보고드림.

1		용역 개요

○ 용 역 명 : 가리봉 도시재생 활성화계획 수립용역

○ 용역업체 : ㈜미래이앤디

○ 기간 및 계약금액

구 분	용역 기간	계약금액	비 고
1차	‘14.9.17~‘15.12.31	453,200천원	준공
2차	‘16.3.4~‘16.6.30	92,000천원	진행 중

2		추진 경위

○ ‘14. 9. 17 : 1차 용역 계약 (준공기한 : ‘15.7.16)

○ ‘14. 9. 25 : 용역 착수

○ ‘15. 7. 15 : 준공기한 연장 (‘15.7.16 → ‘15.12.31)

○ ‘16. 1. 12 : 기술심사 타당성 심사결과 통보 (기술심사담당관-537)

○ ‘16. 3. 4  : 2차 용역 계약 (준공기한 : ‘15.6.30)

3		변경 계획

○ 연장사유 : 활성화계획 수립을 위한 절차이행 및 주민 의견수렴

- 국토교통부 도시재생 지원사업 선정에 따른 절차이행(관문심사, 국무총리실

특별위원회 심의)

- 지역 주민과의 지속적인 소통과 의견수렴

- 관계부서 협의 및 추가사업 발굴 등을 통한 활성화계획 내용 보완

※ 2016.6.23  합의각서 제출 (미래이앤디⇢시)

○ 주요 변경내용

- 과업기간 : ‘16.6.30. ⇒ ‘16.12.31. (6개월 연장)

- 용역비   : 29,950,000원(금이천구백구십오만원) 증액

○ 추가 과업내용

구 분

내 역

증액(천원)

신 설

□ 센터운영 인력지원(상근 1인)

구분	산출내역	비고
① 상주인력	1인×6개월×2,000,000원/월= 12,000,000원
② 부가세(①×10%)	1,200,000원
계 (①+②)	13,200,000원

13,200

변 경

□ 직접인건비 (증13,560천원)

- 조직의 운영활성화 방안

․활성화계획 워크숍, 주민협의체 활동지원 , 앵커시설 임시활용 지원 등

구 분		당 초	변 경	비 고
①	직접인건비	2,032,485 원	6,925,934 원
	제경비	2,235,733 원	7,618,527 원
	기술료	853,643 원	2,908,892 원
계		5,121,861 원	17,453,353 원
② 부가세(①×10%)		512,186 원	1,745,335 원
계 (①+②)		5,634,047 원	19,198,688 원
증감		증 13,560,000 원

□ 직접경비 (증 3,190천원)

- 각종 보고 및 자문자료 ( 6회 → 30회)

- 주민간담회 운영경비 (10회 → 20회)

구 분		당 초	변 경	비 고
①	각종 보고 및 자문자료	600,000 원	3,000,000 원	10 만원/회
	주민간담회 운영경비	500,000 원	1,000,000 원	5 만원/회
계		1,100,000 원	4,000,000 원
② 부가세(①×10%)		110,000 원	400,000 원
계 (①+②)		1,210,000 원	4,400,000 원
증감		증 3,190,000 원

16,750

계

29,950

○ 귀책사유 : 서울특별시

- 국토교통부 도시재생 지원사업 선정에 따른 행정절차 이행과 지역 주민과함께 실질적인 활성화계획 수립 요청

○ 지체상금 부과여부 : 미 부과

4		조치 의견

○ 계약업체로부터 합의각서가 제출되었고 용역 내용의 충실을 기하기 위하여 용역계약 변경이 필요하다고 판단되므로 관련규정(지방자치단체 용역계약 일반조건)에 따라 계약변경을 시행코자 함

5		향후 계획

○ ‘16. 6.   : 용역 계약변경 의뢰( → 재무과)

○ ‘16.12.30. : 용역 준공 처리

붙임 : 1. 과업내용서 및 설계내역서(변경) 각 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.