문서번호	방재시설부-9897
결재일자	2016.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
노태학		이도헌	06/29 임춘근
협조

『용두3빗물펌프장 신설공사 폐기물처리용역(총차2회,2차1회)』

설계변경 검토보고

2016. 6.

방재시설부

『용두3 및 신이문 빗물펌프장 신증설공사 건설폐기물처리용역』

설계변경(총차2회, 2차1회)  검토 보고

우리본부에서 시행중인「용두3 및 신이문 빗물펌프장 신증설공사 건설폐기물처리용역」에 대한 총괄2회, 2차1회 설계변경  검토보고 임.

용역개요

❍ 용 역 명 : 용두3 및 신이문 빗물펌프장 신증설공사 건설폐기물처리용역

❍ 용역개요 : 건설폐기물 운반 및 처리 3,250톤(2차 901톤)

❍ 용역기간 : 2013. 04. 23 ∼ 2016. 06. 30

❍ 용 역 비 : 113,993,000원(2차분 56,342,000원)

❍ 용 역 사 : ㈜오성디엔이 대표 이두희 외 1

보고내용

❍ 총차2회 및 2차1회 설계변경

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총차 (2회)	79,556,400원	113,993,000원	증)34,436,600원
2차 (1회)	21,905,400원	56,342,000원	증)34,436,600원

❍ 설계변경 사유

- 총  차 : 용두 빗물펌프장 증설공사 시행중 폐기물량 증가

→ 폐콘크리트 479톤(증), 폐아스콘 927톤(증)

- 2  차 : 용두 빗물펌프장 증설공사 시행중 폐기물량 증가

→ 폐콘크리트 479톤(증), 폐아스콘 927(증)

❍ 총차2회 설계변경 내역

공 종		단위	수 량
			당초	변경	증ㆍ감
운반처리	폐콘크리트	Ton	2,314	2,793	증) 479
	폐아스콘	Ton	714	1,641	증) 927
	건축폐기물	Ton	222	222	-

❍ 2차1회 설계변경 내역

공 종		단위	수 량
			당초	변경	증ㆍ감
운반처리	폐콘크리트	Ton	382	861	증) 479
	폐아스콘	Ton	519	1,446	증) 927
	건축폐기물	Ton	-	-	-

조치의견

❍ 원활한 업무 추진을 위해 총차 및 2차 폐기물 용역을 설계변경코자 함.

붙임 : 1) 책임감리원 검토의견서 1부.

2) 설계변경내역서(총차2회, 2차1회) 각 1부.  끝.