함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(뚝도 고도정수처리 시설공사 폐기물 처리용역 총차분 3회,6차분(금차) 2회)

우리본부에서 시행중인「뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 폐기물 처리 용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

○ 용 역 명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수 처리시설공사 폐기물 처리 용역

○ 용역개요 : 건설폐기물 수집, 운반 및 중간처리 106,195 ton

○ 용역기간 : 총차분 ’10.08.10.~’16.12.31.(6차분 ’14.12.27.~’16.06.30.)

○ 계약금액 : 총차분 1,113,200,000원(6차분 460,790,000원)

○ 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비자산, 건설중인자산, 시설비및부대비, 시설비

○ 계 약 자 : (주)장형기업 대표 김봉숙

○ 설계변경 내역

① 주요 변경사유

- 폐기물 실제 처리수량을 반영하여 총차분 내역 조정 및 6차분 감액

② 설계변경 관련 근거

- ‘폐기물처리용역 설계변경 시행보고’ [시설과-5810(’16.06.29.)]

③ 총차분 계약 기간 및 금액 변경 현황

- 계약기간 : 변경없음

- 계약금액 : 변경없음(※내역조정)

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	1,012,000,000	1,012,000,000	-
부가가치세	101,200,000	101,200,000	-
계	1,113,200,000	1,113,200,000	-

④ 6차분(금차) 계약 기간 및 금액 변경 현황

- 계약기간 : 변경없음

- 계약금액 : 감액

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	418,900,000	358,890,909	감) 60,009,091
부가세	41,890,000	35,889,091	감) 6,000,909
계	460,790,000	394,780,000	감) 66,010,000

붙임 : 설계변경 품의서 및 관련 서류 각 1부.  끝.

	시설안전부장
주무관	문정주		시설과장	김도섭		시설안전부장	전결 06/29 강신재
협조자
시행	시설과-5851	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1455	/전송	02-3146-1529	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	대시민공개