투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(서울역 주변 교차로 개선 전기공사)

우리 본부에서 시행 중인 아래 전기공사에 대하여 설계변경 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울역 주변 교차로 개선 전기공사

나. 공사금액 : 725,637천원

다. 시 공 사 : (주)신흥이엔지 대표자 채종근

라. 공사기간 : ’15.10.02.~’16.12.31(변경없음)

마. 공사금액 변경 현황

[원]

구 분	당 초	변 경	증 ·감	비 고
계약금액	725,637,000	774,906,000	증49,269,000

바. 변경사유

- 서울지방경찰청 및 유관기관 협의 결과에 따른 물량 변경

따로붙임 : 1. 관련 공문서 각 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박병환		건축설비과장	김영수		설비부장	07/01 권오식
협조자	주무관	김석기
시행	설비부-10434	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8628	/전송	02)3708-8659	/	pbhw2002@seoul.go.kr	/	부분공개(5)