투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	서울대공원 지하구 보수,보강공사 정비공사 설계변경(총차2회, 제2차1회) 의뢰

1. 시설과 – 4539호(2016. 07. 11)와 관련입니다.

2. 현재 진행중인『서울대공원 지하구 보수,보강공사 정비공사』에 대한 설계변경(총차2회, 제2차1회)을 아래와 같이 의뢰합니다.

가. 공 사 명 :『서울대공원 지하구 보수·보강공사(장기계속)』

나. 도급금액 : 총공사 부기금액)  금1,514,645,000원

제2차) 금521,085,000원

다. 공사기간 : 총 차) 2015. 09. 01 ~ 2016. 7. 30.

제2차) 2015. 12. 31 ~ 2016. 7. 30

라. 계약업체 : 유진건설(주) 대표 김 학 경

마. 설계변경내용

□ 총 차 분(2회)                                                    (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고 (증 · 감)
총 공 사 비	1,514,645,000	1,664,142,000	증 149,497,000
도 급 비	1,514,645,000	1,664,142,000	증 149,497,000

□ 제2차분(1회)                                                     (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고 (증 · 감)
총 공 사 비	521,085,000	670,582,000	증 149,497,000
도 급 비	521,085,000	670,582,000	증 149,497,000

바. 사    유

- 트렌치(배수로) 시공방법 변경 등 신규공종 발생에 따른 변경

- 지하구 시공물량 증･감에 따른 변경

사. 예산과목 : 서울대공원, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수  및 정비, 시설비, 공동구내 화재방지 및 구조물개선

붙임  1) 설계변경 사유서 1부

2) 차수별 예산집행 계획  1부.

3) 차수별 변경내역서(총차,2차) 각 1부.

4) 설계변경 도서 (도면별첨) 각1부.   끝.

	서울대공원장
주무관	손영민		주무관	한상길		시설과장	전결 07/12 공헌구
협조자
시행	시설과-4553	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	500-7441	/전송	507-7230	/	sonym6974@seoul.go.kr	/	부분공개(6)