- 7호선 천왕차량기지 외 1개소 디지털전자감응식도유기 설치 -

복합공사 종합관리계획

7호선 천왕차량기지 외 1개소에 디지털전자감응식도유기 설치 전 전용 차단기함 설치 등 유관부서와의 사전협의, 적기 자료제공 등 효율적인 공정관리를 통해 공사시행에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

▢ 기술감사처-109 (2014.09.30) :

종합(복합)공사 공정관리 조치 요구사항 통보

▢ 궤도처-726(2016.04.05) :

차량기지 레일도유기 신규설치 시행 알림

▢ 기술지원단-7018 (2016.06.02) :

레일도유기 전용 차단기함 설치공사 사업 추진계획 송부

2		현 황

▢ 레일도유기 현황

구 분	계	호 선 별				비고
		5호선	6호선	7호선	8호선
합 계	117	67	15	29	6
디지털전자감응식도유기	115	66	15	28	6
브러쉬	2	1	-	1	-

그리이스 유출구 그리이스 호스	도유기 본체

3		종합관리 세부계획

▢ 도유기 전용 차단기함 설치(기술지원단 전기기계부)

구 분	구간	위치	선별	수량	비 고
도유기 전용 차단기함	고덕기지	48k564	하	1
	천왕기지	0k190 (#111A 앞)	피트선	1
		1k046 (#153 앞)	출고선	1
		1k053 (#103B 앞)	출고선	1

○ 구    분 : 도유기 전용콘센트함 설치

○ 예산과목 : 선로설비

○ 편성예산 : 6,000,000원 × 4개소 = 24,000,000원

○ 소요예산 : 16,360,000원

(공사 16,060,000원, 감독경비 300,000원)

▢ 디지털전자감응식도유기 설치(시설지원단 궤도장비부)

구간	선별	수량	곡선현황				곡선반경	설치 위치
			완화 곡선	원곡선 시점	원곡선 종점	완화 곡선
상일~고덕기지	하	1	48k302	48k337	48k794	48k827	302	48k564
천왕기지	피트선	1	곡선없음(#111A 분기기 앞)				-	0k190
천왕기지	출고선	1	곡선없음(#153 분기기 앞)				-	1k046
천왕기지	출고선	1	곡선없음(#103B 분기기 앞)				-	1k053

○ 구    분 : 디지털전자감응식도유기 설치

○ 예산과목 : 선로설비

○ 편성예산 : 8,700,000원 × 4개소 = 34,800,000원

○ 소요예산 : 옥내형 7,200,000원 × 1개소 = 7,200,000원

옥외형 7,800,000원 × 3개소 = 23,400,000원

▢ 도유기 설치위치

구분	설 치 위 치
고덕 기지
천왕 기지

▢ 세부추진일정

구 분		2016년
		1분기						2분기						3분기						4분기
		1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월
차단기함 설치	발주 계약의뢰
	설치 시행
	준공
도유기 설치	발주 계약의뢰
	설치 시행
	준공

※ 상기 추진일정은 현장여건에 따라 변경 시행될 수 있음.

4		결 론

상기와 같이 디지털전자감응식도유기 설치에 대한 효율적인 공정관리를 통해 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.  끝.