문서번호	조경과-3797
결재일자	2016.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경과장	관리부장	서울대공원장
호명옥	강인호	代이행용	전결 07/20 송천헌
협 조
	총무과장		이행용
	전략기획실장		윤대진
	동물복지2과장		송부용
	주무관		강금완

열대조류관 관람데크 보수 계획

2016. 7.

관  리  부

(조경과)

열대조류관 관람데크 보수 계획

열대조류관 관람데크(sky-walk) 측면마감 목재의 탈락으로 인하여 안전사고 등의 우려가 있어 신속하게 보수하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

❍ 기    간 : 2016. 7. 25. ~ 7. 29.

❍ 위    치 : 열대조류관

❍ 사업내용 : 관람데크 측면마감 보수 1식(정비면적 : 21.1㎡)

※ 동물복지2과-2122(2016. 6. 23) 보수요청

❍ 대상사진 및 도면

Ⅱ		예산확보 계획

❍ 소요예산 : 9,273천원

- 시 설 비 : 공사비(8,000천원)

(단위 : 천원)

예 산 명	예산과목	예산액	집행액	금회사용액	비고
조경시설물 정비사업	시설비	158,650	149,966	8,000	낙찰차액 (8,684)

· 예산과목 : 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 조경시설물설치및정비, 시설비(100-401-01)[낙찰차액]

- 재 료 비 : 목재 조달구매(1,273천원)

· 예산과목 : 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 꽃동산조성및녹지조경시설물유지관리, 재료비(100-206-01)

Ⅲ		추 진 일 정

❍ 2016. 7. 21.: 공사발주

❍ 2016. 7. 25.: 공사착공

❍ 2016. 7. 29.: 공사준공

Ⅳ		기 대 효 과

❍ 안전사고 예방 및 쾌적한 관람환경 제공.  끝.