투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	용역기한 연기 계약 의뢰(동물사 실내공기질 개선공사 실시설계 용역)

1. 시설과-4823(’16.07.21.)호와 관련입니다.

2. 『동물사 실내공기질 개선공사 실시설계 용역』 기한을 변경계약 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 동물사 실내공기질 개선공사 실시설계 용역

나. 계 약 자 : ㈜미도설비기술사사무소 대표 심재곤

다. 용역기한 변경

구 분	변경 전	변경 후	비 고
용역기간	2016. 05. 02. ~ 07. 30.	2016. 05. 02. ~ 09. 29.	60일 연기

- 연기사유 : 과업내용 변경에 따른 현장 조사와 실시설계에 필요한 용역기간 반영

- 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 예산과목 : 공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능및야생동물종보전,

공원안전시설보수및정비, 시설비

붙임  1. 실시설계 용역기간 연기 검토 보고 1부.

2. 합의서 및 준공기한 연기의뢰서 각 1부.  끝.

	시설과장
주무관	박도원		주무관	조대복		시설과장	07/22 공헌구
협조자	주무관	정한성
시행	시설과-4873	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7424	/전송	02-507-7230	/		/	부분공개(7)