문서번호		푸른도시과-13540		★주무관		공원팀장	푸른도시과장		도시관리국장
결재일자		2016.8.5.
				김응주		이병호	김운식		08/05 이동일
공개여부		대시민공개
				협 조
보도여부
	- 근교산(오패산) 자락길 조성사업 - 노선 변경 전문가 자문(심의)계획
2016.8.5.
도시관리국

- 근교산(오패산) 자락길 조성사업 -

노선 변경 전문가 자문(심의)계획

근교산(오패산) 자락길 조성사업 민원발생에 따른 사업구간 변경 노선에 대하여 전문가 자문(심의)을 실시 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사업개요

위    치: 오동실내배드민턴장∼강북구민운동장

규    모: 약1.3㎞

사업기간: 2015.10.18. ∼ 2016.10.30.

사업내용: 무장애 산책로, 휴게쉼터, 수목식재 등

소요예산: 1,800백만원(도급비 1,489백만원, 관급자재 311백만원)

Ⅱ		추진경위

근교산 자락길 조성사업 계획 수립	2015.01.09.

실시설계용역 시행	2015.03.06.~08.30.

근교산 자락길 조성사업 주민설명회 개최	2015.04.27.

서울시 건설기술심의(기술심사담당관)	2015.07.29.

근교산 자락길 조성사업 공사착공	2015.10.16.

민원발생(현대·금호A) 주민 면담(2회)	2016.02.22./02.25.

민원발생(현대·금호A) 현장설명회	2016.05.04.

근교산 자락길 조성사업 노선 변경계획 수립	2016.05.31.

Ⅲ		전문가 자문(심의)계획

일    시: 2016. 8.11.(목) 10:00 ∼ 12:00

장    소: 강북구민운동장 현장사무실

자문(심의)내용

노선 변경 대상지 적정성 검토 및 현장 점검

시공방법 등 건설기술심의 결과 변경여부 검토

위    원

구 분	소 속	직 급	성 명	자 격	비고
전문가	아트스프링(주)	부사장	홍태식	건설기술심의 위원
	대하이앤씨	대표	김수복	구조기술사
	도화엔지니어링	이사	장병진	조경기술사
	김포산림조합	사업과장	문태철	산림공학기술사
	서울시 자연생태과	녹지6급	이상용	서울시 담당
발주부서	푸른도시과	과장	김운식	푸른도시과장
		공원팀장	이병호	담당팀장
		녹지7급	김응주	담당
감독부서	서울시시설관리공단		조은경	공사감독
시 공 사	㈜산오름	대표	장영환
		이사	김철웅	현장대리인

진행순서

구 분	진 행 내 용	소요시간	비고
노선 변경 전문가 자문 (심의)	노선변경 추진경위 등 설명	10:00∼10:30 (30분)	현장대리인
	노선변경 대상지 현장점검	10:30∼11:30 (60분)
	전문가 의견 수렴	11:30∼12:00 (30분)

Ⅳ		향후계획

사업구간 노선변경에 따른 전문가 자문(심의)내용을 토대로 자락길 조성사업 추진에 만전을 기하고자 함.  끝.