문서번호	기전과-8510
결재일자	2016.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
호정오		양영민	08/05 한동근
협조

교통신호기 신설공사(연간단가 1차)

실정보고사항 검토보고(2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8.

서부도로사업소

(기  전  과)

교통신호기 신설공사(연간단가 1차)

실정보고사항 검토보고(2회)

교통신호기 신설공사(연간단가-1차) 업무수행 중에 책임감리가 제출한 1차 작업지시 실정보고(2회)에 대하여 내용을 검토하고 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2016년 교통신호기 신설공사(연간단가) 1차 작업지시 실정보고(2회)

- 문서번호 대영유비텍(주) 대영전기감16A-08-05호(2016.08.04.)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2016년 교통신호기 신설공사(연간단가)

○ 공사위치: 서부도로사업소 관내(중구, 서대문구, 용산구, 마포구, 은평구)

○ 공사내용: 교통신호기 신설 1식

○ 계약금액: 699,000,000원

○ 공사기간: 2016.3.14. ∼ 2016.12.26.

○ 계약업체: 모범전설(주) 대표 오세창

○ 감리업체: 대영유비텍(주)

□ 1차 작업지시개요

○ 작업위치: 마포구 공덕래미안아파트 5차 외 10개소

○ 작업지시금액: 222,850,000원

○ 작업지시기간: 2016.5.2. ∼ 2016.8.31.

□ 실정보고 내용

○ 변경 예상금액: 감 33,000천원(222,850천원 → 189,850천원)

○ 세부내역

- 신사중앙의원: 감 33,500천원

․설계오류의 제어기 및 부분품 물량 변경

- 아현초교 정문: 증 500천원

․시청 교통정보과의 광통신 신설 불가로 전용회선 설치에 따른 물량 변경

․교통정보과-11651호(2016.7.21.)

(교통신호기 공사시 통신공사비 확보 등 업무협조 요청)

※ 붙임 실정보고 참조

□ 조치의견

○ 감리업체 실정보고 내용이 타당하므로 감리업체에 우선 실정보고 내용에 따라 작업 시행토록 지시하고 추후 정산하고자 함

붙임  감리업체 1차 작업지시 실정보고 1부.  끝.