주요심사내용

▣ 공 사 명 : 말죽거리 보도육교 보행환경 개선공사

□ 사업개요

위 치	강남구 도곡동 916번지 앞
공사개요	- 엘리베이터(15인승) 신설 2개소, 육교슬래브 바닥 및 계단정비 160㎡, - 육교 난간정비 108m, 육교 재도장 221㎡ 등
공사기간	착공일로부터 2016. 12. 31.

□ 심사평가 결과

구 분	설 계 금 액	심 사 금 액	조 정 금 액	조 정 률
도 급 액	484,429,000	471,401,000	-13,028,000	-2.69%
재 료 비	146,590,621	143,842,930	-2,747,691
노 무 비	129,986,507	125,424,716	-4,561,791
경 비	39,799,708	39,135,460	-664,248
제 경 비	168,052,164	162,997,894	-5,054,270

□ 주요 심사내용(조정내역 및 사유)

◦ 자재 및 견적, 산출단가 조정

- 구조용H형강 등

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 볼트조이기 및 풀기 : 임팩트 렌치사용

- 강판구멍뚫기 : 마그네틱 전자드릴사용

- 그라우팅 : 인력 및 장비수량 조정 [품셈5-2-1]

- 최신 노임단가 반영

□ 기타사항

◦ 심사결과에 따른 설계도서를 반드시 수정 후 사업시행

◦ 심사금액에 대하여 현장 등 제반여건을 고려한 경제적인 원가계산 가능 시 자체 반영 후 결과 제출

◦ 관급자재비 및 이설비 심사제외