공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 말죽거리 보도육교 보행환경 개선공사

2. 위    치 : 강남구 도곡동 916-2 ~ 서초구 양재동 1

3. 공사목적 : 본 공사는 이용에 불편한 말죽거리 보도육교에 대해 엘리베이터

설치 및 노후시설 리모델링을 시행하여 육교이용의 편의성 증대

및 안전사고를 예방코자 시행하는 공사임

4. 총공사비 : 648,047천원

(도급비 471,401천원, 관급비 154,938천원, 이전비 17,586천원)

5. 공사개요 :  엘리베이터(15인승) 신설 2개소, 육교슬래브 바닥 및 계단

정비 160㎡, 육교 난간정비 108m, 육교 재도장 221㎡ 등

6. 공사기간 : 착공일로부터  2016. 12.31까지

7. 하자검사기간 : 준공검사일로부터 2년

8. 설계변경조건 :

본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 설계변경을 할 수 있다.

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호모순되는 점이         있을 경우

2) 발주기관의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단 되었을 경우

3) 새로운 기술, 공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의         효과가 현저할 경우

4) 기타 발주기관이 설계서 및 물량변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

9. 국민건강, 노인장기, 국민연금, 산업안전관리, 퇴직공제부금, 환경보전 등

1) 사용하지 않은 상기 제경비는 준공시 정산처리 한다.

10. 사  토  장 : 수도권 김포 매립지를 원칙으로 한다.

11. 기타 유의사항

◦ 자재단가 : 2016년 7월 가격정보지 및 물가정보지 중에서 최저단가 적용

◦ 노    임 : 대한건설협회 조사발표 2016년 1월 기준 시장조사한 노임            단가적용

◦ 폐기물관리 : 공사 시행시 발생하는 폐기물의 상차 운반의 투명성을 확보하기 위한 근거자료(일자,차량번호,물량,사진 등)를 작성 비치하여야 함

◦ 발생토사관리 : 현장에서 발생하는 양질의 토사는 서울시 사이버 흙은행(Http://soilbank.seoul.go.kr)시스템에 등록하여 상호 이용이 가능하도록 조치하여야 함