서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	「인권현장 표지석 및 조형물 제작·설치」용역 계약기간 연장 요청

1. 「인권현장 표지석 및 조형물 제작․설치」용역 계약 연장 계획(인권담당관-8205, 2016.8.9.)관련입니다.

2. 「인권현장 표지석 및 조형물 제작․설치」용역을 다음과 같이 연장하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약내용

1) 계약건명 : 「인권현장 표지석 및 조형물 제작․설치」용역

2) 계약업체 : ㈜삼양디자인

3) 계약금액 : 금502,920,000원(금오억이백구십이만원)

4) 계약기간 : 2015. 12. 15. ~ 2016. 8. 15.

나. 변경내용

구 분	변경 전	변경 후	비 고
계약기간	2015. 12. 15. ∼ 2016. 8. 15.	2015. 12. 15. ∼ 2016. 11. 30.
계약금액	금502,920,000원	금502,920,000원	변경없음

붙임. 1.「인권현장 표지석 및 조형물 제작․설치」용역 계약 연장 계획 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	인권담당관
주무관	류지원		인권협력팀장	이용재		인권담당관	08/09 代정정길
협조자
시행	인권담당관-8232	(		)	접수		(		)
우	04524	서울시 중구 세종대로 110, 2층 인권담당관	/
전화	02-2133-6384	/전송	02-2133-0797	/	miso607@seoul.go.kr	/	대시민공개