문서번호	시설과-863
결재일자	2014.2.17.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	관리부장
협 조
	조경과장
	동물복지과장
	주무관
	주무관

「시설개선 협의회」

회의결과 보고(2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

서울대공원

(시 설 과)

「시설개선 협의회」

회의결과 보고(2회)

우리 공원의「시설개선 협의회」회의결과를 아래와 같이 보고 드림

(관련근거: 시설과-205(`14.1.13)

□ 회의개요

❍ 일   시 : `14.2.12(수) 16:00~17:30

❍ 장   소 : 대공원 간부회의실

❍ 참 석 자 : 관리부장, 시설과장, 기반시설안전추진반장, 조경과장, 동물복지과장, 이춘한, 조대복, 이상국, 윤희숙, 김흔진, 유종태, 한상길, 조진성, 정삼모

❍ 회의안건

① 백두산 호랑이숲 조성공사	(주관: 조경과)

② 동물탈출방지 휀스 설치사업	(주관: 조경과)

③ 노후시설 긴급정비 추진방안	(주관: 시설과, 동물복지과)

④ 설계변경자문기준(안)	(주관: 시설과)

⑤ 추진현황(1회) 보고	(주관: 시설과)

⑥「시설개선 전담 TF회의체」명칭 변경	(주관: 시설과)

□ 회의내용

대상사업 및 회의내용

부서의견

① 백두산 호랑이숲 조성공사

- 동물탈출 및 안전사고 방지관련 시설보완 방안의 적정성 논의

- 시설보완 방안의 설계변경 반영여부 검토 등

관리부장

- 관람대상부 가림판→전책으로 대체하는 방안 검토,  STS미끄럼판, 목재가림막 등의 설계변경(안)은 필요성과 대안을 검토하여 설계변경을 최소화하도록 검토 필요

시 설 과

- 설계변경 증액이 2억원 이상인 경우 투자심사 대상(30억원)이 되므로 관련규정에 따른 심사절차를 거쳐야 할 것임

기반시설 안전추진반

- 총공사업비 20억원이상으로 1회 증액부분이 2억원 이상인 경우「사업계획변경조정위원회」의 심의를 득하여야 함

- 안전휀스 하단부 줄기초 방안을 경계석으로 설치하는 방안도 검토 필요

조 경 과

- 설계변경(안)에 대한 타당성 및 적합성 재검토

② 동물탈출방지 휀스설치 사업

- CCTV은 추진반의 CCTV 설치예산에 반영 여부

- 휀스설치 동선 및 재료, 디자인 선정방안 논의

기반시설 안전추진반

- CCTV 설치 요구수량이 400대로 우선순위를 감안하여 설치 예정임

조 경 과

- 동물탈출방지를 위해 CCTV는 필요하므로 반영 필요함(9대)

- 휀스 동선, 재료 및 디자인 선정 등 전문가 자문회의 의견 수렴 후 결정 예정임

③ 노후시설 긴급점검 지적사항 추진방안

- 호랑이 및 화재사고 이후 긴급 점검 및 특별감사 지적사항에 대한 후속 조치방안 논의

관리부장

- 점검 지적사항은 市에 보고된 사항으로 신속히 정비를 추진해야 됨

사례) 동양관 악어휀스 설치 등

시 설 과

- 호랑이 및 화재사고 이후 긴급 점검 및 특별감사 조치가 신속하게 이루어져야 함

- 지적사항에 대한 추진실적 관리 등 전담부서 지정 필요

- 점검 지적사항을 동시에 보수가 곤란하므로 우선순위 선정 필요
- 지적사항

총 계	동물사점검	외부전문가 합동점검	市 감사지적
498	397(105)	84(10)	17
※ 총 498건중 115건 정비완료

동물복지과

- 동물사 우선순위: 대동물관→유인원관→제3AF→곰사→큰물새장→남미관→맹금사→가금사→호주관→황새마을→낙타사→들소사→동물한마당→제2AF→공작마을→사슴사→홍학사→야행관→곤충관/어린이동물원→소동물관

④ 설계변경자문기준(안)

- 설계변경 자문기준(안)에 대한 우리 공원내 적용 여부

- 본 위원회 세부기준 및 적용시기 논의

시 설 과

- 설계변경이 교차 점검 및 외부전문가 검토가 이루어지는 경우 내실화를 기할 수 있음

- 긴급사항이 발생된 경우 위원회 소집 등으로 사업 지연의 우려가 있음

기반시설 안전추진반

- 설계변경의 적정성을 기하기 위해 자문기준을 운영하는 것은 타당할 것으로 보임

조 경 과

-「도시기반시설본부」에서 운영한 경험에 비추어 위원회 운영을 통해 설계변경의 타당성 검토 등 실질적인 효과가 있었던 것으로 판단됨

⑤ 추진현황(1회) 보고

CCTV 통합관제센터 구축

- CCTV 위치선정 등 추진반과 동물원이 합동조사중(약 400대)으로 2월중으로 설계 및 심사의뢰 예정임

공무직등 근로자 대기실 설치공사

- 설계 용역은 건물 전체를 실시하고 예산범위내에서
지하, 2층, 3층을 공사 시행하는 것으로 결정
(1층구간 제외)

토종 동물존 조성사업

- 시행주체: 시설과로 결정하여 방침 상신중임

⑥「시설개선전담 TF회의체」명칭 변경

- 현재: 시설개선전담 TF회의체

- 변경: 시설개선 협의회

- 사유: 용어의 명확성과 간소화를 위해 명칭 변경 필요

□ 회의결과

❍ 백두산 호랑이숲 조성공사

⇒ 시민안전과 동물탈출방지를 위한 시설 보완시 설계변경의 타당성, 대안 등 제반사항을 검토하여 설계변경을 최소화하도록 할 것

❍ 동물탈출방지 휀스설치 사업

⇒ 휀스 동선, 재료 및 디자인 선정 등 전문가 자문회의 의견 수렴 후 결정

❍ 노후시설 긴급점검 지적사항 추진방안

⇒ 총괄부서 : 시설과

∙ 대   상: 동물사 합동점검, 기반시설 외부전문가 합동점검 및 특별감사 지적사항

∙ 추진내용 : 정비계획 수립 및 추진실적 관리

❍ 설계변경자문기준(안)

⇒ 자문위원회 위원수를 소규모로 조정하여 운영․시행(위원수: 4명)

❍ 추진현황(1회) 보고

⇒ 시설개선 협의체(3회) 개최시 1~2회차 포함하여 추진실적 보고

❍ 명칭 변경

⇒ 현재:「시설개선전담 TF회의체」→ 변경:「시설개선 협의회」로 변경

□ 향후계획

❍「시설개선 협의회」개최(3회)

- 일    시 : `14. 2. 26(수) 16:00

- 장    소 : 대공원 간부회의실

- 참 석 자 : 관리부장, 시설과장외 관련 담당자

- 협조사항 : 회의안건 `14.2.21(금)까지 제출

※ 내실있는 자료검토를 위해 안건 제출시 각종 방침서, 설계도서 등 제출

□ 행정사항

❍「시설개선 협의체」활성화를 위해 직원의 필요성 인식제고가 필요한 바 대상사업이 시설 개선사업으로 2천만원 이상인 경우,

본 협의체 의결 이후 예산배정 및 공사발주가 가능하도록 협조 요청(총무과)

- 2천만원 이하의 경우에도 다수 분야가 복합되어 있는 경우에는 협의체 대상임

붙임 : 1. 회의개요 1부.

2. 회의자료 1부.

3. 회의전경 1부.  끝.