투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	시설관리과장
(경유)
제목	변경계약체결 통보 - 반포 교통개선 도로정비공사 건설폐기물 처리 용역

1. 시설관리과-2266(2016.7.28.)호와 관련입니다.

2. 「반포 교통개선 도로정비공사 건설폐기물 처리 용역」건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

용 역 명	반포 교통개선 도로정비공사 건설폐기물 처리 용역
계약상대자	㈜동보이앤시 (대표 : 김지환)
계 약 금 액	금29,631,000원(금이천구백육십삼만일천원)
계 약 일 자	2016.01.08.
공 사 기 간	2016.01.08. ~ 2016.07.30.

나. 변경내역 : 금액 변경(증10,369,000원)

(단위 : 원)

변 경 내 역	변경전	변경후
금 액 변 경	29,631,000	40,000,000

다. 변경사유 : 현장여건에 따른 계약물량 증.감으로 도급비 변경

붙     임 : 1. 용역변경계약서 1부.

2. 납부필증명서 1부.  끝.

	총무부장
주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	08/16 이상국
협조자
시행	총무과-14258	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5 7)