【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

◦ 요청번호 : 2016 – 67 호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2016.08.20 시 간 : 09:00～18:00	휴 일	본선구간	시공사	○	○
			발주청
			감리사
작업내용	- 방음벽 기초보강구간(의정부방향) 터파기, 가시설 설치 - 방음벽 기초신설구간(종점부) 기초 철근 조립 - 장암지하차도 집수정 벽체철근조립 및 용접 - 수락고가차도 수평비계 설치작업

상기와 같이 휴일작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2016. 08. 16

현장대리인  권 송 구 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

---------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2016 – 67 호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무

계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
작업일 : 2016.08.20 시 간 : 09:00～18:00	공정계획에 의한 감리휴일 근무	감리사	오종철		토요일

2016. 08. 16

책임건설사업관리기술자  윤 성 필  (인)

도시기반시설본부장 귀하

【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

◦ 요청번호 : 2016 – 68 호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2016.08.21 시 간 : 09:00～18:00	휴 일	본선구간	시공사	○	○
			발주청
			감리사
작업내용	- 방음벽 기초보강구간(의정부방향) 터파기, 가시설 설치 - 방음벽 기초신설구간(종점부) 기초 철근 조립 - 장암지하차도 집수정 벽체철근조립 및 용접 - 수락고가차도 수평비계 설치작업

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2016. 08. 16

현장대리인  권 송 구 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

---------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2016 – 68 호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무

계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
작업일 : 2016.08.21 시 간 : 09:00～18:00	공정계획에 의한 감리휴일 근무	감리사	이흥균		일요일

2016. 08. 16

책임건설사업관리기술자  윤  성 필  (인)

도시기반시설본부장 귀하

<작업장별 감리원 및 현장책임자 배치현황>

- 작업장 개소가 많은 경우 (동부간선도로확장공사 3공구)

구 분		1구간	2구간			3구간			비고
연 장		458m	350m	267m	398m	160m	90m	240m	건축공사
공사내용 (공정률)		아스콘포장 (100%)	방음벽기초 보강 및 설치 (10%)	캔틸레버 옹벽 (97%)	수락고가 및 진입램프 시공 (58%)	U-TYPE구간 구조물 시공 (95%)	BOX구간 구조물 시공 (85%)	방음벽기초 및 설치 신설 (2%)	전기관리실동 (90%)
평일	작업장
	현 장 책임관	공사 과장 협력업체 소장				공사 과장 협력업체 소장
	감리원	감리원 3명 순회근무
휴일	작업장
	현 장 책임관	공사과장 협력업체 소장				공사과장 협력업체 소장
	안 전	안전관리자				안전관리자
	감리원	필요시 감리원 1명 순회근무

범례

작업구간