하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 특 별 시 S H 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	천왕2지구도시형생활주택 특별대책반 회의 결과 보고(8.23)

1. 사장 방침 제710(2016.07.28.)호 「천왕2지구 도시형생활주택 건설공사 1단지 미준공보고」관련입니다.

2. 천왕2지구도시형생활주택건설공사 미준공에 따른 특별대책반 현장회의 결과를 아래와 같이 보고합니다.

▢ 특별대책반 현장 회의결과 보고

가. 일    시 : 2016.08.23(화) 15:00

나. 장    소 : 천왕2지구도시형생활주택 상황실

다. 참 석 자 :

- SH공사 :건설안전사업본부장외 공사부장 및 감독

- 감리단 : 감리단장외 공종별담당자

- 시공회사 : 현장대리인외 공종별 담당자

라. 회의내용 :

- 기존 미지급금(약 4.5억)은 8.31일까지 반드시 해결하고 미해결 시                     계약불이행으로 계약조건에 따라 처리 할 것

- 시공회사에서는 자금 지출계획서를 작성하여 차기 회의에 보고할 것

- 차기 회의에는 시공회사 대표이사를 반드시 참석 시킬 것

- 시공회사와 협의가 완료된 지급자재 반입 및 설치 계획에 따라 관리를

철저히 할 것

- 감리단에서는 품질 및 안전관리를 철저히 할 것

- 설계변경이 필요한 사항은 조속히 보고 후 처리 할 것

- 도로 및 학교용지 인수인계가 원할히 될 수 있도록 준비 할 것

- 현장 입구 주변 자재 정리하여 관리할 것

- 기계 세부공정 작성 시 건축공정을 고려하여 작성하고 시운전 및 각종                  인증을 조기 획득 시 공기 단축 가능하니 검토할 것

붙임  1. 공사현황보고_특별대책반자료_2016.08.23

2. 주요자재 투입일정_시공회사 협의완료.  끝.

부 원						파트장				건설사업부장			건설사업처장
		노재윤						박보순			정성호			김영수
건설안전사업본부장					08/24
		장달수
협조자

시행			건설사업부-6011				(2016.08.24)			접수				()
방침번호			본부장 방침 제332호
우	06336			서울시 강남구 개포로621								/
전화		02-3410-8919			전송	02-3410-7949		/	jazz170@i-sh.co.kr					/	공개